투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(가로수보호판-유공관) 계약수량 변경 요청(한강숲조성공사)

2014년 한강숲(가을)조성공사 관급자재(가로수보호판-유공관)에 대한 수량변경이 발생하여 계약수량 및 금액변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 한강숲(가을) 조성공사

나. 사    유 : 수목식재 본당 유공관 수량 조정

다. 납품요구번호 : 12-14-1-53806-00

라. 계 약 자 : 어스그린코리아(주)

마. 요 구 일 : 2014.11.13

바. 납품기한 : 2014.12.15

사. 변경요청 내용

물품식별번호	품명/규격	단위	단가(원)	변경요청수량			변경계약금액
				당초	변경	증감	당초	변경	증감
22181979	가로수보호판 (유공관)	개	5,200	2,338	1,748	△590	12,157,600	9,089,600	△3,068,000
조달수수료							65,650	49,080	△16,570
계									△3,084,570

아. 예산과목 : 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 녹지시설유지관리,시설비

. 끝.

	생태공원과장
주무관	나선영		생태공원과장	12/05 최병언
협조자
시행	생태공원과-2780	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3780-0630	/전송	02-3780-0745	/		/	대시민공개