내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	강북구청장(생활보장과장)
(경유)
제목	강북장애인복지관 기능보강사업 변경 검토결과 알림

1. 생활보장과-37686(2014.11.03.)호와 관련입니다.

2. 강북장애인복지관 기능보강사업 변경요청에 대하여 아래와 같이 검토결과를 안내하오니 사업추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 : 강북장애인복지관(강북구)

나. 사업명 : 노후 엘리베이터 정비 및 노후시설 개선 및 환경정비사업 등

다. 사업비 : 총 400,000천원

라. 요청내역 : 효율적인 공사를 위한 사업내역 일부 변경

(단위:천원)

변경대상		당 초	변 경	증(△)감	비 고
노후 엘리베이터 정비 및 노후시설 개선 및 환경정비사업 등	복지관 1,3층 시설개보수 및 환경개선공사	69,604	164,900	95,296	공사의 효율성을 위해서 공사내역 일부 수정
	대형버스 교체	185,000	185,000	0
	엘리베이터 모터, 감속기교체	7,000	18,000	11,000	모터, 감속기의 부품 일부의 교체 계획이였으나, 안전상의 문제로 전면 교체 필요함.
	식기세척기 구입	6,000	14,000	8,000	노후화된 식기세척기 설치, 식기소독기 및 가스관 교체 필요함.
	1,4,5층 펜코일 유닛 교체	23,000	0	△23,000	2015년 기능보강사업 복지관 전층 교체 신청함.
	종합운동능력 도구 구입	2,500	2,500	0
	기타	106,896	0	△106,896
	복지관 개인정보 지킴이 프로그램 설치	0	9,600	9,600	개인정보보호법 발효에 따라 이용자들의 개인정보보호를 위해 프로그램 설치 필요함.
	지하 화장실 배수펌프 교체	0	6,000	6,000	배수 펌프의 노후화로 오물이 새고 악취가 심해 교체 필요함
소계		400,000	400,000	0

마. 검토결과

요 청 이 유	검 토 결과
○ 환경개선공사의 효율적인 수행을 위한 공사 내역 일부 수정으로 사업변경 승인 요청함.	ㅇ이용자 편의제공 및 사업효율성을 위해 공사일부를 변경하는 환경개선공사로 추가 사업비가 소요되지 않고 사업예산 내에서 추진하는 공사로서 변경요청이 적정함.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김종민		장애인재가복지팀장	김지형		장애인자립지원과장	12/05 고경희
협조자
시행	장애인자립지원과-18345	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 1층(장애인자립지원과)	/
전화	2133-7474(7474)	/전송	02-2133-0722	/	godbachi@seoul.go.kr	/	대시민공개