투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제15차 설계변경자문회의(소위원회) 개최 알림

1. 2014년 제15차 설계변경자문회의(소위원회) 개최와 관련입니다.

2. 설계변경자문회의를 아래와 같이 위원 선정하여 개최하오니 발주부서 담당자는 자문자료에 단가결정, 협의근거, 설계자검토의견, 실정보고서, 발주처 방침서 등 근거자료를 포함 작성(쪽번호 명시)하여 자문위원에게 사전 배포하여 주시기 바라며,

3. 자문위원께서는 협의단가 적용의 타당성, 공법 변경의 적정성, 설계변경 절차 이행의 타당성등을 면밀히(사전) 검토하여 내실있는 자문이 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문회의 개최 계획

제 목	제15차 설계변경자문회의(소위원회)
일 시	2014. 12. 16(화) 14:00
장 소	도시기반시설본부 토목부 회의실(서소문별관 2동 3층)
자문위원	위원장 : 토 목 부 도시고속도로과장 명 경 출 간 사 : 토 목 부 박 웅 교 위 원 : 토목부 정문수, 토목부 홍상필 감리단장 전영호(강남순환도시고속도로민간투자사업건설공사 5공구) (*************) 감리단장 김용선(서빙고 및 강변북로 연결로개선공사) (*************) 감리단장 금동욱(신림~봉천터널 도로공사 2공구) (*************)
자문안건 (11건)	1. 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 ------------------ 방재시설부 ο 강재손료 변경 ⇒ 증 62,480천원 ο 신설펌프장 옹벽 시공물량 변경 ⇒ 감 44,000천원 2. 잠원2 빗물펌프장 신설공사 ----------------------- 방재시설부 ο 가설방음벽 변경 ⇒ 증 124,593천원 ο 공기연장 간접비 반영 ⇒ 증 298,848천원 3. 동부간선도로 확장공사(3공구) --------------------- 토 목 부 ο 가드레일 TYPE 변경 ⇒ 증 198,834천원 ο 방음벽 기초형식 변경 및 철탑부 방음벽 추가 설치 ⇒ 증 77,616천원 ο 장암지하차도 인접도로 보강 ⇒ 증 175,655천원 4. 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 ----------------- 토 목 부 ο 도로부속시설 설치비 반영 ⇒ 증 84,711천원 ο KBS송신소(학습관)앞 변속차로 설치 ⇒ 증 64,353천원 ο 보행자용 방호울타리 설치 ⇒ 증 98,164천원 ο 시점부(우측) 옹벽 형식변경 ⇒ 감 165,396천원

붙임 : 설계변경 소위원회 자문요청서(11건)  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	방재시설부장,강남순환도시고속도로 민간투자사업건설공사(5공구) 감리단장 전영호님,서빙고 및 강변북로 연결로개선공사 감리단장 김용선님,신림~봉천터널 도로공사(2공구) 감리단장 금동욱님
주무관	박웅교		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/08 노우성
협조자
시행	토목부-24346	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개