함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 시행에 따른 계약의뢰(문정동 순환배관공사)

우리사업소에서 시행하고 시설관리공단에서 위탁감독한 『문정동 순환배관공사』에 대하여 설계변경을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 문정동 순환배관공사

나. 도 급 자 : ㈜신우씨앤이  대표 진영모

다. 공사기간 : 2014.10.20 ~ 2014.12.11

라. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후송배수관정비)21102000

마. 변경사유 : 신공종 및 계약물량 증·감사항 발생

바. 변경내역

(단위: 원)

구 분	금 액		증·감	비 고
	당 초	변 경
도 급 비	118,854,400	124,685,000	증) 5,830,600

붙  임  1. 방침서(당초금액 수정) 및 설계변경 사전심의 결과서 1부.

2. 설계변경내역서 및 관련서류 각1부.

3. 원가계산제비율검증표 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이덕규		주무관	이경재		급수운영과장	12/11 양상윤
협조자
시행	급수운영과-19783	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개