문서번호	급수운영과-30898
결재일자	2014.12.11.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
박상권		12/11 안재엽
협 조
	주무관		오원선

설계변경 심의 결과 보고

(2014년 대현산배수지외 4개소 항청소용역-최종)

2014. 12

동부수도사업소

급 수 운 영 과

설계변경 심의 결과 보고

□ 설계변경 개요

가. 용 역 명 : 2014년 대현산배수지외 4개소 항청소 용역

나. 용역기간 : 2014. 4. 4 ~ 2014. 12. 20

다. 도 급 자 : 하나테크 대표 김영순

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비	246,563,000	243,628,000	감) 2,935,000
공급가액	224,148,182	221,480,000	감) 2,668,182
부가가치세	22,414,818	22,148,000	감) 266,818

라. 설계변경 내역                                             (단위:원)

□ 심의내용

가. 일    시 : 2014. 12. 11(목) 13:00

나. 심 의 자 : 급수운영과장등 5명

다. 심의내용

∘ 변경물량 산출 등의 적정여부(세정제시험의뢰 비용 등),제경비 실정산

□ 심의결과

가. 신규공종 단가적용의 적정성 : 적정함

나. 주요 공종별 물량 변경사항 : 타당함

다. 기타  제잡비 적용 적정성 등 : 적정함

□ 조치의견

∘ 심의결과 설계변경이 타당함으로 본청 재무과에 계약의뢰코자함.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의의견서 1부.  끝.