문서번호	디자인정책과-11494
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화디자인팀장	디자인정책과장
이문자		김지형	12/11 유보화
협조

「2014년 도시갤러리 유지보수 용역」

계약변경 추진계획

2014. 12.

디자인정책과

「2014년 도시갤러리 유지보수 용역」

계약변경 추진계획

Ⅰ		용역개요

○ 건 명 : 2014년 도시갤러리 유지보수 용역

○ 업 체 : ㈜비에스플랜

○ 유지보수 금액 : 35,600,000원(20건)

○ 계약년월일 : 2014. 11. 13.

○ 착수년월일 : 2014. 11. 14.

○ 준공기한   : 2014. 12. 13

Ⅱ		계약변경 추진

○ 계약변경 내역

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
기 간	2014.11.14 ～ 2014.12.13.	2014.11.14 ～ 2014.12.25.	12일 연장

- 예산과목 : 디자인 역량 강화추진, SOFT 서울기반구축사업, 문화예술분야 도시             시설물유지관리, 일반운영비, 사무관리비

※ 계약금액 변경없음

○ 변경사유 : 비, 한파로 인한 보수 지연

- 유지보수 과업기간 중 비 또는 최저기온 –5℃ 이하의 한파가 12일 이상 발생하여, 보수작품의 95%가 야외에 설치된 환경과 기온의 영향을 받는 작품 도장 작업을 일정대로 진행하기 어려워 보수 지연

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임 : 기상청 날씨자료 1부.  끝.