문서번호	생태공원과-2887
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
석승우		최병언	12/15 차광재
협 조
	총무과장			최대봉
	기획예산과장			박병현

한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역

준공기한 연장 검토

공  원  부

(생태공원과)

한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역

준공기한 연장 검토

우리본부에서 추진 중인 ｢한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여, 한강시민위원회 자문 검토 및 하천점용허가 신청 등의 사유로 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

용역개요

○  용 역 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역

○  위    치 : 이촌한강공원(한강철교 북단 주변)

○  설계내용 : 자연형 호안 조성, 천변습지 및 저습지, 습지관찰대, 버드나무림 조성, 휴게쉼터, 다목적운동장 등

○ 용역기간 : 2014. 4. 29 ~ 12. 24

○ 용 역 비 : 231,297천원

○ 용역기관 : 동부엔지니어링㈜, ㈜유신

준공기한 연장

○ 용역기간 : 2개월(62일) 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비 고
당 초	2014. 4. 29. ~ 12. 24.	변동없음
변 경	2014. 4. 29. ~ 2015. 2. 24.

○ 연장사유

- 한강시민위원회 본회의 자문내용 검토 반영 및 과업기간 연장 조정이 필요하다는 자문의견 수용

- 용역완료 후 하천점용허가 신청에 따른 협의기간 소요

귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 : 미부과

검토의견

○ 한강시민위원회 제11차 본회의(2014.11.12) 개최에 따른 자문내용 검토 반영 및 세부사항 설계 반영을 위해 과업기간 연장 조정이 필요하다는 자문의견을 수용하고,

○ 용역완료 후 서울지방국토관리청 하천점용허가 신청에 따른 업무협의, 설계보완 등의 기간이 필요한 바,

○ 상기와 같이 기본 및 실시설계용역 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다. 끝.