문서번호	정보기획담당관-18153
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		웹서비스관리팀장	정보기획담당관
박경여		배상미	12/15 김종근
협조	콘텐츠기획팀장		한철우
	주무관		안금희

2014년 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 사업

월  간  보  고  (11월)

2014. 12

정보기획단

(정보기획담당관)

2014년 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 사업

월  간  보  고  (11월)

서울시 홈페이지의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는 『2014년 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 사업』의 11월중  주요 추진과업에 대하여 보고함.

Ⅰ		사업개요

○ 사업기간 : ‘14. 3. 1 ~ ’15. 2. 28

○ 계약금액 : 1,220백만원

○ 계약업체 : (주)윤커뮤니케이션

○ 주요 사업내용

- 서울시 홈페이지 콘텐츠 기획 및 웹마케팅 추진

- 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영

- 분야별 홈페이지 및 공공서비스 통합예약시스템 운영

- 공통기반시스템 안정적 운영 및 기능개선

- 홈페이지 웹접근성 및 웹호환성 개선, 웹취약성 제거

Ⅱ		‘14년 11월 주요 과업내용

○ 주요 업무 추진내역

- 기존 서비스 개선

․ 비실명회원 폐지관련 회원 프로그램변경 (11/10)

․ 교통분야 > 버스비리신고 게시판 추가 (11/26)

․ 관리자페이지 SSL 적용 완료 (11/26)

․ 워드프레스 코어 업그레이드 적용 및 배포 (11/19)

- 이벤트 및 신규 서비스

․ 대학생을 위한 하반기 학자금 이자지원 이벤트 오픈 (11/03)

․ 서울브랜드 시민참여단 이벤트 오픈 (11/03)

․ [디지털스토리텔링]힘내라 수험생  (11/10)

․ 제야의 종 희망시민 추천 이벤트 (11/25)

․ 온라인시장실 메인화면 기능추가 (11/18)

개발진행 중 과업

․ 서북병원 워드프레스 전환 (95%, 12월2주)

․ 아동복지센터 워드프레스 전환 (20%)

․ Festival 테마제작 (90%)

․ 스토리인서울, Festival 관리자 제작 (50%)

․ 새소식 API 개선 (50%)

․ [디지털스토리텔링] 서울 눈썰매장 스케이트장 (50%)

○ 시스템 운영관리

분 야	‘14년 11월 작업요청건수		작업요청 누계
사업품질관리	42		326
기 획	48		559
콘텐츠 제작	2		18
콘텐츠 재가공	0		297
디 자 인	59		639
퍼블리싱	42		500
개 발	111		1,037
합 계	302		3,374

※ 세부 작업내역〔별첨1〕

○ 신규 사이트 구축 및 이벤트

‘대학생 학자금 이자지원’ 이벤트 오픈
▪ 서비스 오픈 : 14. 11. 03 ▪ 대학생을 위한 하반기 학자금 이자지원 신청 페이지 오픈

‘서울브랜드 시민참여단’ 이벤트 오픈
▪ 서비스 오픈 : 14. 11. 03 ▪ 서울브랜드 선정을 위한 시민 참여단을 모집하기 위한 이벤트 페이지 개발

‘서북병원’ 메인시안 확정
▪ 시안 확정일 : 14. 11. 08 ▪ 워드프레스 통합중인 서북병원의 메인 화면 시안 확정

‘힘내라 수험생’ 오픈
▪ 서비스 오픈 : 14. 11. 10 ▪ [디지털 스토리텔링] 수험생을 위한 희망덧글 달기 캠페인 - 힘내라 수험생페이지 제작 및 오픈

‘온라인 시장실’ 수정 오픈
▪ 수정 오픈일 : 14. 11. 18 ▪ 시장님의 현재 활동을 실시간으로 보여주는 “지금 원순씨는?” 영역 추가 및 디자인 개선

‘제야의 종 희망시민 추천 페이지’ 오픈
▪ 오픈일 : 14. 11. 25 ▪ 2014년 제야의 종 타종행사에 참여할 인사를 추천하는 이벤트 페이지 오픈

비실명회원제 폐지관련 변경
▪ 적용일 : 14. 11. 10 ▪ 비실명회원제 폐지와 관련하여, 비실명 가입을 차단하고 본인인증 수단을 추가

‘버스비리신고 게시판’ 추가
▪ 적용일 : 14. 11. 26 ▪ 교통분야에 버스 종사자 채용비리 신고를 위한 게시판 개설완료

‘관리자페이지 SSL' 적용 완료
▪ 적용일 : 14. 11. 26 ▪ 관리자 로그인 페이지에 SSL을 적용하여, 보안강화

○ 11월 월간보고 회의 개최

일시 : ‘14. 12. 5(금) 13:00 ~ 14:00

장소 : 정보기획단 3층 회의실

참석 : 콘텐츠기획팀 및 웹서비스관리팀, 사업관련 담당자 및 수행사

내용 : 11월 과업내역 보고 및 진행과업 관련 이슈보고 및 질의

Ⅲ		‘14. 12월 주요 과업계획

○ 신규 콘텐츠 제작

디지털 스토리텔링 “겨울안전” 오픈

디지털 스토리텔링 “눈썰매장 및 스케이트장” 오픈

○ 워드프레스 플래폼 보안 업그레이드

○ 시장실 메뉴(의기양양)추가

○ 게시판 비실명제 전환작업

○ 서북병원 워드프레스 통합 오픈

○ 아동복지재단 워드프레스 통합작업 준비

Ⅳ		기성금 준공

(단위:원)

기성준공	기성준공 금액	비 고
2014. 11월	101,666,670

[별첨1]

세부 작업 내역(11월)

과업구분	과업분야	내 용
기획/관리	사업 품질관리	워드프레스 코어업그레이드 적용완료
		중간보고회
		월간 산출 정리
	기획	온라인시장실 메인 및 관리자 추가기획
		Festival/스토리인 메인관리자 기획
		아동복지센터 기능이관 기획
		서북병원 홈페이지 워드프레스 전환 기획
		[콘텐츠기획] 서울 겨울안전 기획 서울 눈썰매장 스케이트장 기획
워드프레스 (플랫폼)	플랫폼 고도화	서북병원 워드프레스 통합(진행중)
		모바일 눈물그만 수정
		플래폼 코어 업그레이드
		온라인 시장실 메인화면 기능추가
신규사이트 구축 및 이벤트	이벤트	명예부시장 추천 이벤트 (11/28)
		수능희망 덧글 이벤트 (11/10)
		제야의 종 희망시민 공개추천 이벤트 (11/26)
기존프로그램 개선	마일리지	마일리지 시스템 모니터링 및 로그 일일배치
		소멸예정 마일리지 표시방법 수정
	대표 홈페이지	메인배너 실국관리자 NameSearch 연동
		메인관리자 보안취약점 개선
	회원	비실명회원 폐지작업 진행
		회원탈퇴시 SNS 알리미 신청 취소처리
	기타	웹서버 LOG 개선작업
		Web2B 패치작업
		풍물시장 로그인 페이지 변경
	SPP/ CMS2	관리자 시스템 SSL적용
		과부하 모니터링 및 조치
	예약	레드마인(형상관리) 과업처리 진행