투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연장에 따른 변경계약 요청

1. 생태공원과-2887(2014. 12. 15)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인 ｢한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여, 아래와 같이 준공기한 연장코자 하오니 변경계약 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2014. 4. 29 ~ 12. 24

- 용 역 비 : 231,297천원

- 용 역 사 : 동부엔지니어링㈜, ㈜유신

나. 준공기한 연장 : 2개월(62일) 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비고
당 초	2014. 4. 29 ~ 12. 24	변동없음
변 경	2014. 4. 29 ~ 2015. 2. 24

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

첨부 : 준공기한 연장 검토보고서(방침서) 1부.  끝.

	생태공원과장
주무관	석승우		생태공원과장	12/16 최병언
협조자
시행	생태공원과-2890	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257 (성수동1가 645-25)	/
전화	02)3780-0631	/전송	02)3780-0745	/	seoksw@seoul.go.kr	/	대시민공개