문서번호	도시철도설계부-4767
결재일자	2013.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
오반교	박상태	박상돈	신한철		06/20 조성일
협 조
	시설국장			이광세

『 ′13. 5 수방대비 특별안전점검 』

지적사항 조치결과 보고

2013. 6.

도시기반시설본부

(도시철도설계부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	건설안전자문위원	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	건설기술관리법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

'13. 5월 수방대비 특별안전점검

지적사항 조치결과 보고

우기철 공사장의 수해예방을 위하여 건설안전자문위원과 합동으로 실시한 지적사항에 대한 조치결과 보고임

【2013. 6. 5 특별점검 결과보고 관련】

점검개요

점 검 일 : ′13.5.15(수) ~ 5.24(금) - 7일간

점검대상 : 38개 공사장

점 검 반 : 20개반 78명

- 건설안전자문위원 : 대학교수 등 분야별 전문가(39명)

- 본   부 : 안전과 (39명)

점검내용 : 수방대책 및 준비사항, 하천공사장 유수소통 지장물 제거 상태, 흙막이공 및 절․성토사면 관리상태, 시민불편사항 등

지적현황

부서별 공사장 및 지적 현황

구 분	계	시 설 국				도시철도국
		소계	토목부	건축부	설비부	소계	도철공무부	도철토목부
대상공사장	38	14	21	2	2	13	6	7
지적건수	136	91	77	5	9	45	27	18

유형별 지적 현황

구 분		수방대비	토공․가시설 토류벽분야	안전분야 (지장물 포함)	터널/ 계측분야	기술검토 분야	품질분야	시민불편사항 (교통 등)	기 타 (환경 등)
지적건수	136	56	16	20	9	8	8	5	14
비 율	100	41%	12%	15%	7%	6%	6%	3%	10%

지적사항 조치 현황

지적사항 136건중 127건은 조치완료하고 9건은 조치중 또는 시기 미도래로 조치계획에 의거 시행할 계획임

미조치 사항 조치계획 : 9건

연번	공 사 명	지 적 사 항	조 치 계 획
1	도림교 확장공사	교량 하부 기존 전기선로가 홍수 시 하천물의 흐름에 저해되니 대책이 필요함	관리기관인 한전과 협의중 (시기 미도래)
2	관악산 저류조 설치공사	버들댐을 천공하여 강관삽입 시는 댐을 전면 재시공하여야 할것으로 생각되는바, 현 계획대로 시행하는 것이 좋을것임	서울대측 요구사항으로 서울대와 협의결과에 따라 처리예정 (시기 미도래)
3	염창2외 1개소 빗물펌프장 증설	토공이 완료된 굴착부분에 대하여는 우기전에 바닥구조물 공사를 조속 시행할것	7월15한 구조물 시공예정 (시기 미도래)
4	월드컵대교 건설공사	P7 교각철근 배근중으로 현재 검토중인 우물통 상부의 추가 타설여부는 가능한 조속히 결정하여, 교각타설 이전에 연결용 철근을 배치하기 바라며 상면은 외측으로 구배를 조정하여 물이 체수되지 않도록 조치요함	P7 우물통 상부의 1.0m 추가타설 여부 검토중이며, 추가 타설시 물이 체수되지 않도록 구배조정 하겠음
5		우물통 상단고를 평수위 보다 높게 설치하여 선박통행 시 안전확보하고, 우물통 높이 조정을 조기 결정하여 교각과 일체감이 되도록 조치요함	높이조정 검토중
6		공사용 바지선 강경호외 10척은 삼성계류장에 거치 예정으로 바지선 관리실태 및 구조안전성에 대하여 한국선급에서 안전도검사를 시행중으로 검사완료 후 결과보고서 제출요함	한국선급에서 바지선 보강요구에 따라 보강작업중으로 6월30일까지 제출 예정 ※ 비상시 선박이 대피할 수 있는 계류시설은 설치완료

연번	공 사 명	지 적 사 항	조 치 계 획
7	서남분뇨처리시설 증설	침투수에 대한 누수대비 방호로 공사장 외곽부에 설치하는 Sheet Pile이 미설치된 약 150m 연장부분은 터파기에 우선하여 조속 폐합할것	7월10한 시트파일 폐합예정
8		어스앵커 정착력이 최대 66ton이나 실트층에서는 그라우팅 정착력이 감소될 수 있으니 Load Cell 계측기를‘+’ 형태로 배치하여 응력전이에 의해 응력이 감소되는 문제를 검토바람	전문가 검토중으로 검토결과에 의거 조치예정
9	지하철 915공구	926정거장 작업장내 환기를 위하여 송풍기를 조속히 설치요함	6월말까지 설치예정

향후계획

조치사항 및 조치중인 9건에 대하여는 정기점검 시 조치실태를 지속적으로 점검․관리하고자 함

따로붙임 :1) 주요 지적사항 조치 결과 및 전․후 사진 1부.

2) 공사장별 지적사항 조치내용(전체) 1부. 끝.