시의원 요구 자료 제출

시 행	공원녹지정책과-16559	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.10.25.
보존기간	년
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(도시안전수석전문위원),기획담당관

주무관	공원관리2팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장		결재
김성태	진재훈	구아미	10/25 오해영
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 2203번, 유광상 의원, 도시안전위원회)

붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

유광상 의원(도시안전위원회, 민주당)

○ 요구번호 : 2203번

○ 요구내용

1. 어린이대공원 관련

- 어린이대공원내 위탁현황 및 관련 서류 일체(공고문, 계약서 등)

- 전체 위탁사업 계약명, 계약기간, 계약업체, 계약금액 등을 표로 작성

2. 어린이대공원 내 놀이시설 공사 관련

- 놀이시설 공사 진행 현황

- 놀이시설 공사 진행 방식

- 놀이시설 공사 전·후의 운영방식에 대한 비교표 및 도식화, 장단점 및 특징

- 계약서등 관련 서류 일체

□ 어린이대공원 내 위탁현황은 붙임과 같습니다.

○ 어린이대공원 내 위탁현황 : [붙임 1] 참조

○ 어린이대공원 내 위탁 관련서류(공고문 및 계약서) : [붙임 2] 참조

□ 어린이대공원 내 놀이시설 공사 관련 현황은 붙임과 같습니다.

○ 놀이시설 공사 진행 현황

- 위    치 : 광진구 능동 18번지 어린이대공원 내

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2014. 5

- 사 업 비 : 15,950백만원

- 사업내용 : 놀이기구 10종 설치(범퍼카 16대구매 포함)

- 추진현황 : 전체공정률 46%(놀이기구 제작 81%, 기초공사 및 설치 10%)

- 향후계획

·2013.10 ~ 2013.11 : 제작 및 선적완료

·2013.12 ~ 2014. 2 : 국내 반입 및 설치 완료

·2014. 3 ~ 2014. 4 : 안전검사 및 시운전

·2014. 5 : 놀이동산 재개장(예정)

○ 놀이시설 공사 진행 방식

- 계약관련

·제5회 서울특별시 계약심의위원회 결과 “협상에 의한 계약” 결정 (2012.5.11.)

·입찰공고, 현장설명회, 제안서 평가위원회, 협상진행 등 (2012.6 ~ 2012.12)

·협상에 의한 계약완료 (2012.12.21)

‣ 계약건명 : 어린이대공원 놀이동산 유원시설 유기기구 제조 구매 설치

‣ 계약금액 : 15,950백만원

‣ 계 약 자 : ㈜신흥기계 컨소시엄 (㈜신흥기계, ㈜퍼시픽 어뮤즈먼트, 월드엔지니어링)

‣ 계약내용 : 신규 놀이기구 10종 구매 및 설치 등

※ 2013.10월 현재, 사정 변경에 따른 일부 내용 변경 계약 준비

- 공사관련

·놀이기구 각 기종별 제조업체(해외업체 포함) 직접 제작

‣ 총 5개국 (네델란드, 독일, 이태리, 미국, 한국) 10개 기종 제작 중

‣ 제작 현장 및 기구 상태 확인을 위한 해외 제작 현장 검수 (2차례)

·놀이기구 설치현장 기존 놀이시설 철거 및 설치 기초 작업 실시

‣ 매주 1차례 공정회의 진행 (발주처 및 계약업체 참석)

‣ 2014. 2월 까지 놀이기구 현장설치 (예정)

○ 놀이시설 공사 전·후의 운영방식에 대한 비교표 및 도식화, 장단점 및 특징

- 어린이대공원 놀이동산은 서울특별시시설관리공단(어린이대공원 수탁기관)과 현(現)운영업체가 맺은 협약에 따라 위탁 운영되어왔으며,

-“어린이대공원 놀이동산 재조성 사업”에 따른 변경 사항, 관련 법률, 당초 협약 내용 등을 종합적으로 검토 후 협약 변경을 통해 구체적인 위탁 운영방식 결정

※ 놀이동산 재조성 사업에 따라 2012.7.1.부터 놀이동산 운영 중지 중

○ 계약서등 관련서류 일체 : [붙임 3] 참조

붙임 : 1. 어린이대공원내 위탁현황 1부.

2. 어린이대공원내 위탁관련 공고문 및 계약서 각 1부(용량 초과로 메일송부).

3. 어린이대공원내 놀이시설 공사 협약서 1부.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (공원녹지정책과)	담당사무관	진재훈
	☎ 2133-2036	주무관	김성태
	서울특별시 (공원녹지정책과)	담당사무관	진재훈
	☎ 2133-2037	주무관	강건영
	작 성 일 : 2013. 10