내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	강북구청장(생활보장과장)
(경유)
제목	강북장애인복지관 기능보강사업 발주주체 변경 검토결과 통보

1. 생활보장과-42290(2014.12.12.)호와 관련입니다.

2. 강북장애인복지관 기능보강사업 변경요청에 대하여 아래와 같이 검토결과를 통보하오니 사업추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 : 강북장애인복지관(강북구)

나. 사업명 : 복지관 1, 3층 시설 개보수

다. 사업비 : 총 329,800천원                       (단위:천원)

사업명	사업 종류	사 업 비			비고
		계	시비	구비
복지관 1, 3층 시설 개보수	개보수	329,800	164,900	164,900

라. 요청내역 : 사업시행자를 강북구청에서 강북장애인복지관으로 변경

마. 검토사항

요 청 이 유	검 토 결과
○자재비 상승으로 인한 공사금액 확대로 인한 공사의 어려움 및 자치구 직접 시행에 따른 공사 표준원가보다 원광장애인복지관에서 발주 가능한 시장가격이 현저히 낮아 예산절감 효과 발생 - 자치구 발주시 소요비용 : 227,900천원 - 복지관 발주시 소요비용 : 182,686천원 ○직접 시설에서 발주하여 공사하는 것이 효율적으로 사업비 절감과 효율성강화를 위하여 발주주체를 변경 승인 요청함. 단, 추가사업비는 복지관 자부담	- 1억원 이상 개보수공사는 자치구 발주 대상 사업이나 자재비 상승으로 인한 공사비 확대 등 외부환경 변화에 적극대처하고 사업비가 현저하게 절감 되는 등 예산 절감 효과 크며, - 성공적인 사업수행을 위해서 발주주체를 강북구청에서 강북장애인복지관으로 변경 하는 것이 타당함. ※ 단, 공사발주 및 준공과정 점검을 철저히 하여 관련법령에 적법한 사업비 집행이 되어야 할것임.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김종민		장애인재가복지팀장	代조한진		장애인자립지원과장	12/18 代김재창
협조자
시행	장애인자립지원과-19028	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 1층(장애인자립지원과)	/
전화	2133-7474(7474)	/전송	02-2133-0722	/	godbachi@seoul.go.kr	/	대시민공개