함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	(구)구의취수장 도수관로 폐쇄공사 추진일정 알림

1. 문화정책과-13680(2014.11.07) 및 배수과-8205(2014.12.17)

호와 관련입니다.

2. (구)구의취수장 ＃1 도수관로 폐쇄공사 추진일정을 알려드리니 공사예산 확보 등 업무처리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

가. 공사 추진일정 : 2015년 1월경

나. 지연사유

- 터파기 및 콘크리트깨기 작업이 완료되어 도수관로 폐쇄공사를

위한 밸브조절 등 단수(지수)조치를 우리 상수도사업본부(배수과)에 요청한 바,

- 현재 시설안전부(고도정수반)에서 추진중인 구의정수센터 고도

정수시설 시운전 일정과 중복되어 급수운영에 차질이 예상되므로 시운전이 정상추진된

이후 2015년 1월경 재협의토록 회신

다. 요청사항 : 공사예산 확보 및 관로 주변 안전사고 발생 예방 조치

따로붙임 : 1. 밸브조절 요청사항 회신 공문 사본 1부.

2. 도수관로 폐쇄관련 공사 추진현황 1부. 끝

	구의아리수정수센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(문화정책과장),서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),동부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김달회		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	12/18 오세영
협조자
시행	정수시설과-3166	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개