문서번호	기전과-11643
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
박정민		정윤식	12/18 이승진
협 조
	주무관			박신범

『2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사』

조치계획 검토 보고

2014. 12.

북부도로사업소

(기 전 과)

『2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사』

조치계획 검토 보고

우리 사업소에서 보행불편 해소와 교통소통의 질을 높이기 위해 추진한 『2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사』에 대해 공사물량의 증감이 발생하여 아래와 같이 조치계획 검토 보고합니다.

▢ 관련근거

❍ 2014. 12. 10. 감리사 설계변경 기술검토의견서 제출

▢ 사업개요

❍ 공 사 명 : 2014년 소통개선 및 횡단보도 확충사업 교통신호기공사

❍ 공사기간 : 2014. 10. 16 ~ 2015. 2. 28

❍ 계약금액 : 금58,816,060원

❍ 시공업체 : (주)대호전력기술 대표 조진호

❍ 공사위치 : 정부종합청사별관 외교통상부 앞

▢ 설계변경 추진내용

❍ 설계변경 금액                                           (단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증ㆍ감	비 고
계		58,816,060	62,199,000	3,382,940(증)	-
도급비	공사원가	53,469,146	56,544,546	3,075,400(증)	-
	부가가치세	5,346,914	5,654,454	307,540(증)	-

❍ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비(401-01)

❍ 설계변경 사유

- 문서 ″도로과-13113(2014.11.03)″ 통합지주 설치 협조요청으로 물량변경과 현장 여건에 맞도록 공정량 증•감 및 제경비 등 정산에 따른 설계변경 필요

❍ 설계변경 산출 내용

- 책임감리원 기술검토 의견서(설계변경) 주요변경내용 첨부문서 참조

▢ 보고자 의견 및 조치사항

❍ 상기 변경사유와 같이 계약물량 대비 공정량 증‧감에 따라 물량 변경 및 제경비로 인한 증·감부분을 반영한 사항으로,

❍ 책임감리사로부터 접수된 조치계획 내역에 대해 검토한 결과 타당하여 낙찰차액 및 이전비를 활용하여 설계변경 코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 서류 제출(감리사) 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율검증서 1부.  끝.