문서번호	방재시설부-13506
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
최형순		신용우	12/19 임춘근
협조
	도심계획팀장		박송한

맑고 매력있는 세계도시 서울!

『동대문 성곽공원 조성관련』

동대문교회 기념동판 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
방재시설부-9995	감리회유지재단 동대문교회	기념동판(동대문교회) 설치 협의	소송중으로 협의 불가, 교단적으로 상당한 시일이 필요, 기념동상 및 동판설치	25백만원

도시기반시설본부

(방재시설부)

『동대문 성곽공원 조성관련』

동대문교회 기념동판 설치 검토보고

『동대문 성곽공원 조성공사(동대문교회부지)』추진관련 동대문교회 기념동판설치에 대해 감리회유지재단 및 동대문교회와의 협의결과에 따라 처리방향에 대한 검토보고임

□ 기념동판(동대문교회) 설치계획

○ 위    치 : 종로구 종로6가 70번지내 이전 동대문교회 위치지점

○ 재질 및 형태 : 동판(원형)

○ 규    모 : R(반지름)=1m

○ 사 업 비 : 25백만원

○ 설치위치 및 동판이미지

설치위치	동판이미지 및 내용

□ 주요 추진경위

○ ’13.11.11 : 동대문교회 임시예배처 이전 및 교회건물 명도 완료

○ ’13.11.12 ~ ’14. 3.31 : 교회본관 및 십자가탑 철거 완료

○ ’14.  5.  5 : 성곽마을 전시관 조성에 따른 한옥건물 존치

- 한옥건물 존치하여 성곽마을 전시관 및 교회역사자료 전시관으로 활용

○ ’14.  9.  3 : 한옥건물 철거 결정(한양도성자문위원회)

- 성곽복원시 중첩 및 경관저해로 인한 한옥건물 철거

○ ’14.  9.24 : 동대문 성곽공원 조성사업 추진계획(역사도심관리과)

- 한옥건물철거에 따른 기념동판 제작·설치에 대해 교회관계자와 협의

○ ’14.10.10 : 기념동판(동대문교회) 설치 협의(유지재단, 동대문교회)

○ ’14.10.15~11.26 : 기념동판(동대문교회) 설치 협의 회신

- 유지재단 : 현재 소송중인 사안이며 동대문교회처리 문제는 중요한 사안으로 소송결과 후 협의가 가능하며 교단적으로 의견을 조율할 상당한 시일이 요구되므로 협의자체 거절

- 동대문교회 : 교회 성도간의 의견 조율할 상당한 시일이 필요하며 2014.11.26.일에 스크랜톤 선교사 동상과 기념동판 설치 요청함

□ 처리방안

○ 동대문 성곽공원 조성사업은 현재 모든 공정을 완료하고 공사완료 단계에 있으며 동대문교회 기념동판 설치에 대해 유지재단과 동대문교회의 의견이 조율되지 않은 상태에서 협의자체가 제대로 이루어질 수 있는 상황이 아니며

○ 재단과의 협의는 상당한 시일이 요구되며 교회기념 시설물로 동판이외의 시설물 추가시 본공사비로 추진할 수 있는 사항이 아니므로 본 공사는 현상태에서 준공처리하고 향후 기념동판 협의 및 설치는 도시기반시설본부에서 하고 소요예산은 사업추진부서(역사도심관리과)에서 확보하여 설치함이 적절함

□ 향후 추진계획

○ ’14. 12 : 기념동판(동대문교회) 제외 후 공사준공