문서번호	시설관리과-18976
결재일자	2014.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이한수		代연제관	12/19 代임종진
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

(2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사-3차)

2014. 12.

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사(장기계속공사)』시행중 신규공종 및 시공물량 증·감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 완료하고 그 결과를 보고함.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

․ 당 초 : 제수변교체 174개소, 소화전설치 및 보수 61개소, 기아박스 정비 14개소, 관부설 190m

․ 변 경 : 제수변교체 116개소, 소화전설치 및 보수 51개소, 기아박스 정비  4개소, 관부설 130m 신공종 및 물량증감

다. 공사기간 : 2014.05.27 ~ 2015.05.31(총공사 부기기간 : 2014.05.27 ~ 2015.05.31)

라. 도 급 비 : 변경없음

․ 당초 : **************

․ 변경 : **************

마. 도 급 자 : ******************

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2014.12.19(금) 10:00 ~ 11:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

***********************

***********************************************

3. 심 의 내 용

○ 신규공종 및 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

가. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동(증·감) 수량 및 단가 낙찰률 적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 설계변경 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증,감(원)	비 고
도 급 비	***********	***********	*
공급가액	***********	***********	*
부 가 세	***********	***********	**

○ 신공종 및 시공물량 증·감에 따른 변경

가. 신공종 발생

- 원형밸브실 설치공(기초CONC)외 3공종 발생

나. 공사 중 물량 증·감 사항 발생

- 물량증가 : 잔토소운반(0.2터파기동시상차)외 6공종 증가

- 물량감소 : 아스팔트 포장절단외 89공종 감소

○ 설계변경 계약물량 증·감 현황

구 분	신규공종	증	감	합 계	비 고
계	4	7	90	101
토 공		1	6
부 설 공	1		61
구 조 물 공	1	4	11
부 대 공	2	2	12

5. 심의결과

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 신규공종 발생유무 및 적용 적정성 : 적정함

다. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

라. 계약변동(증·감) 물량 게약단가 낙착율 적정 적용여부 : 적정함

마. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

바. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

붙 임 : 1. 설계변경 사유서1부.

2. 설계변경 심의결과 1부.

3. 설계변경 내역서1부.  끝.