함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(광암정수센터 관리본관 방수 및 환경개선공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『광암정수센터 관리본관 방수 및 환경개선공사』를 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 광암정수센터 관리본관 방수 및 환경개선공사

나. 공사규모

○ 본관 지하정원 설치 : 철근콘크리트 타설, 화강석 판붙임

○ 본관 지하 휴게공간 조성 : 단열패널설치, 석재판 붙임, 유리끼우기 등

○ 본관 지하창고 벽체 방수공사 : 단열재 설치, 단열패널 설치 등

다. 계약기간 : 2014.12.3 ~ 2014.12.30

라. 계약업체 : 주식회사 비엘건설 대표 최용훈

마. 설계변경 금액 내역                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	70,496,500	77,260,000	증6,763,500

바. 설계변경사유 : 신규공종 및 시공물량 증․감 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙 임 :  1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의위원회 심의결과 보고서 1부

3. 설계변경 심의위원회 개최 의견서 1부

4. 합의서 1부

5. 제비율검증 1부.  끝.        ※추산 : 182번(12/23)

주무관	박희준		주무관	유혜영		정수시설과장	김창현		광암아리수정수센터소장	12/23 차윤기
협조자
시행	정수시설과-3456	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기 하남시 광암동 174 광암아리수 정수센터 보수과	/
전화	02-3146-5372	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개