문서번호	정수시설과-3454
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	12/23 차윤기
협 조

안전하고 깨끗한 아리수!  세계로 진출하는 아리수!

광암정수센터 관리본관 방수 및 환경개선공사

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

2014. 12.

서울특별시 광암아리수 정수센터

(정수시설과)

『광암정수센터 관리본관 방수 및 환경개선공사』

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행하는 『광암정수센터 관리본관 방수 및 환경 개선공사』 설계변경에 따른 사전심의 소위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 광암정수센터 관리본관 방수 및 환경 개선공사

○ 용역기간 : 2014. 12. 03 ~ 2014. 12. 30

○ 공사규모

- 당초 : 화강석 판 붙임(평벽) 67㎡, 석재판 붙임 34.4㎡, 휴게실 창틀 단열바 스테인리스 프레임 36.04㎡, 석고판 못붙임 75.35㎡, 바탕만들기 75.35㎡, 천장점검구 설치 1개소, 지하서고 단열판 설치 1식 등

- 변경 : 화강석 판 붙임(평벽) 70㎡, 석재판 붙임 74㎡, 휴게실 창틀 단열바 스테인리스 프레임 23㎡,  흡음텍스 설치 75.35㎡, 지하서고 단열판(SGP) 설치 1식 등

○ 도 급 액 : 70,496,500원(당초) → 77,260,000원(변경)

○ 도 급 자 : 주식회사 비엘건설 대표 최용훈

Ⅱ		심의위원회 개최 개요

○ 개최일자 : 2014. 12. 23(화)  15:00~15:30

○ 개최장소 : 정수시설과 사무실

○ 심의내용 : 물량 증․감 적용 적정여부, 설계변경 내역 적정여부

○ 참석위원 : 정수시설과장 김창현외 4명

Ⅲ		개최결과 및 조치의견

○ 설계변경심의소위원회를 개최하여 설계변경 적정여부에 대한 심의결과 심사위원 전원 검토내용 적정의견 제시함.

○ 심의위원 모두 적정의견으로 설계변경 원안대로 공사를 시행코자 하며, 계약부서에 계약변경 의뢰코자 함.

붙임 : 설계변경 심의 소위원회 개최 의견서 1부.  끝.