투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경(전체 2회, 2차1회)계약의뢰(탄천물재생센타 복개공원화)

우리 본부에서 조달 발주하여 시행 중인「탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사」설계변경(전체 2회, 2차 1회) 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사

나. 도급금액 : 전 체  26,623,6474,000원

2 차   7,207,000,000원

다. 공사기간 : 전체 2013.10.01 ~ 2016.09.29

2 차 2014.03.07 ~ 2015.03.01

라. 예산과목

물재생시설 개선및관리, 물재생시설개선(하수도사업), 탄천물재생센타 복개공원화

(4단계), 시설비

마. 계약방법 : 장기계속계약

바. 계 약 자 : 웅진개발(주)외 1

사. 설계변경 내용

1) 전체 2회 (기간변경없음)

(단위 : 원)

구 분		금 액				비고
		당 초	변 경	증 ㆍ 감
도급비	공 급 가 액	23,851,340,000	23,734,000,000	감)	117,340,000
	부가가치세	2,385,134,000	2,373,400,000	감)	11,734,000
	계	26,236,474,000	26,107,400,000	감)	129,074,000

2) 2차 1회 (기간변경없음)

(단위 : 원)

구 분		금 액				비고
		당 초	변 경	증 ㆍ 감
도급비	공 급 가 액	6,551,818,182	6,607,000,000	증)	55,181,818
	부가가치세	655,181,818	660,700,000	증)	5,518,182
	계	7,207,000,000	7,267,700,000	증)	60,700,000

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역(전체 2회, 2차 1회) 각 1부.

3. 합의각서(전체, 2차) 각 1 부. 끝.

	방재시설부장
주무관	이정국		방재시설과장	서관석		방재시설부장	12/23 임춘근
협조자
시행	방재시설부-13721	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 2층	/
전화	3708-8764	/전송	3708-8756	/	jung55g@seoul.go.kr	/	대시민공개