투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(도로안내표지판 문안변경 승인 알림)

1.업무지시현장 :  남부순환로(개봉역주변) 구조개선 (주)동명기술공단종합건축사사무소, (주)케이에스씨건설

2.작 성 일 자 : 2015-01-02 00:01:00

3.지 시 내 용

가. 토목부-18637(2014.9.25.)호 및 서울시 교통운영과-23975(2014.12.19.)호 및 구로 교통행정과-41518(2014.12.22.)호와 관련임.

나. “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사” 구간내 설치예정인 도로안내표지판 문안 심의 협의결과 따로붙임과 같이 승인되어 아래와 같이 추가(변경)작업지시 하오니 이행에 철저를 기하시기 바랍니다.

1) 추가(변경) 작업지시 내역

○ 신설표지 6번은 문형식으로 보도신설 구간에 설치

○ 신설표지 7번 설치 위치는 “안양교확장공사” 구간내 예고표지이므로 “안양교확장공사”에서 보도신설 후 설치가 되어야 하는구간이므로 제외

○ 도로안내표지판 설치 완료시 ‘도로표지 관리대장’ 양식에 의거 작성하여 제출

붙임 : 관련 공문 1부. 끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					01/02 최광무
협조자
시행			토목부-64									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개