문서번호	건축부-598
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
현승주		곽동호	01/16 김우성
협조

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사』

철거공사 Kick-off Meeting 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

도시기반시설본부

(건축부)

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사』

철거공사 Kick-off Meeting 결과보고

우리 본부에서 추진 중인『양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사』와 관련 철거공사 Kick-off Meeting 결과를 보고

1. 회의개요

○ 일    시 : 2015.01.16.(금)  14:30 ~ 16:00

○ 장    소 : 양천주민편익시설 공사현장

○ 회의내용 : 시공계획서 발표, 질의․답변, 안전교육, 중점관리 사항 도출 및 대책마련

○ 참 석 자 : 현장대리인(월계 및 하도급사), 건설사업관리자, 발주부서

2. 회의결과(주요내용)

○ 철거 부산물 개구부(배수구, 트랜치 등) 유입 방지대책 마련

○ 철거 중 개구부(수영장 천창, 홀 천창 등) 낙하물 방지대책 마련

○ 후속공정을 고려한 철거공사 검토 필요

○ 철거공사 완료 후 시설물 점검하여 보수계획 수립 및 실행

○ 모든 전기 사용은 접지 확인 후 사용

○ 장비 운용 시 신호수 등 안전 확인 후 실행

○ 화재예방 철저

3. 검토 및 처리 의견

○ 공사 착공 전 중점관리 사항 및 대책을 반영하여 안전시공 및              공사장 안전관리에 철저를 기하도록 처리

4. 향후계획

○ `15.01.19 : 철거공사 착공

○ `15.03월 : 철거공사 완료 및 골조공사 착공

○ `16.06월 : 공사준공(예정)

붙임 : 철거공사 시공계획서 1부.  끝.