문서번호	토목부-1278
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박웅교		홍숭희	01/22 노우성
협조

시추조사비(PS금액) 사용 검토 보고

【도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

시추조사비(PS금액) 사용 검토 보고

【도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사】

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사』의 시추조사비(PS금액) 사용에 대한 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

○ 위    치 : 성북구 정릉동 국민대앞

○ 규    모 : 폭 5～6m, 연장 533m

- 신설램프 : 연장 120m(폭 6.24m), 본선확장 : 연장 82m(폭 5.095m)

- 보도 Box : 연장 31m(폭 6.24m), U-Type : 연장 37m(6.24m)

○ 공사기간 : ‘13.12.30.～’16.12.29.

○ 도 급 비 : 8,992백만원(1차 : 3,009백만원)

○ 감 리 사 : 극동엔지니어링(주) 외 1

○ 시 공 사 : 풍림산업㈜ 외 1

2		관련근거

○ 2015. 1.16. : 시추조사비(PS금액) 사용 승인요청(극감정릉 제15-9호)

3		실정보고 내용

○ 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사와 관련하여 시추조사비가 내역서상 총 7개소에 대한 지반조사를 실시하도록 되어 있으나 PS금액으로 반영되고

○ 정확한 위치가 도면상에 표시되어 있지 않아 시추조사 위치를 시설물의 규모와 중요도를 고려하여 선정하고자 함

- 시추조사비(PS금액) 현황

․시추조사 개소 : 총 7개소(선정위치 없음)

․시추조사비(PS금액) 도급액 : 24,772천원

4		감리단 검토보고 내용

○ 시공중 시추조사에 대한 정확한 위치가 도면에 표시되어 있지 않으므로, 시설물의 규모와 중요도에 따라 위치를 선정하고,

○ 시추조사비는 시추조사결과에 따라 추후 도급금액 범위내에서 정산처리하고자 함.

- 시추조사 위치도

- 시추조사 위치 및 수량

위 치		설 계 시추개소	금 회 시추개소	적정여부
정릉램프교	교 대:STA 0+230		1	적 정
	교각(P1):STA 0+265		1
	교각(P2):STA 0+315		1
	교각(P3):STA 0+350		1
	교각(P4):STA 0+390		1
보도 BOX :STA 0+210			1
옹벽(3.4블럭) :STA 0+130			1
총 계		7	7

- 시추조사비(PS금액) 비교 검토

(단위: 천원)

시추조사비	①설계가	②도급가	③표준품셈	④ 견 적 가 (주)신영지오텍
직접공사비	17,111	15,288	16,443	18,476
제 경 비	10,540	9,484	10,194	11,455
합 계	27,651	24,772	26,637	29,931
검토결과 적용		○

※ 시행 : ②안 : ①②③④안 中 최저가 금액 시행

5		검토 및 조치의견

○ 시공중 시추조사는 시설물의 규모와 중요도에 따라 적정하게 선정된 것으로 판단되므로

○ 감리단 보고내용과 같이 우선 시행하고 추후 시추조사결과에 따라 도급금액 범위내에서 정산하고자 합니다.

붙  임 : 감리단 검토의견서 및 관련 자료 각  1부.  끝.