투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 계약변경 시행 및 계약의뢰(서울거리예술창작센터)

우리본부에서 시행 중인 『서울거리예술창작센터 조성공사』와 관련하여 아래와 같이 계약변경 시행 및 계약의뢰 하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요

가. 용 역 명 : 서울거리예술창작센터 조성공사 건설폐기물처리용역

나. 계 약 자 : 하늘환경 외1

다. 계약금액 : 50,422,000원

라. 계약기간 : ‘14.10.29 ~ ’15.02.05

2. 계약변경내용

변 경 전		변 경 후		비 고
기 간	금 액(원)	기 간	금 액(원)
‘14.10.29~’15.02.05	50,422,000	‘14.10.29~’15.3.31.	좌 동	증) 54일

가. 연기사유 : 진출입로 아스콘포장을 위한 평삭작업 지연으로 인한 폐기물                                처리 용역기간 연장

나. 귀책소재 : 우리본부

붙  임 : 1. 준공기한 연장 검토 보고서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.

	건축부장
전문관	전재진		건축관리과장	곽동호		건축부장	전결 01/27 김우성
협조자
시행	건축부-964	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2635	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개