문서번호	주차계획과-1540
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	02/02 홍현구
협조

서울 약령시 공영주차장 건설 (동대문구) 예산배정 검토

2015. 1.

서 울 특 별 시

(주차계획과)

서울시 약령시 공영주차장 건설 예산배정 검토

(서울약령시 공영주차장 및 한방산업진흥센터 건립 관련)

동대문구에서 추진중인『서울약령시 공영주차장 및 한방산업진흥센터 건립』사업 관련 ‘15년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 배정 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 동대문구 제기동 1082번지 외 24필지

○ 규    모 : 대지면적 2,789.5㎡ (건축연면적 2,696.96㎡)

- 용 도 : 문화 및 집회시설, 근린생활시설 및 주차장

- 공영주차장 : 지하1~3층, 주차면수 199면 (7,033.54㎡)

○ 총사업비 : 46,525백만원 (국 70억, 시 234.6억, 구 160.6억)

○ 사업기간 : ‘09.7 ~ ‘16.12.

Ⅱ. 추진 경위(계획)

○ ‘09. 7 : 주차장 건설계획 수립 (동대문구)

○ ‘10.10 : 도시관리계획(도시계획시설:주차장) 결정

○ ‘13. 8 : 서울시 투자심사 완료 (조건부)

- 조건 : 운영주체 및 시설운영 계획을 구체화하여 경제적 타당성 제고 등 사업계획을 보완하여 중앙투자심사위원회에 의뢰

○ ‘14. 3 : 중앙 투자심사 (조건부)

- 조건 : 한의약 박물관 등 한방 산업진흥센터 조성규모는 축소하되 공영주차장은 향후 수요를 감안하여 적정 규모로 확대

○ ‘14.10 : 시 건설기술심의 조건부 채택(기본 및 실시설계 심의)

○ ‘14.11 : 건축물 철거공사 준공

○ ‘14.11 : 공영주차장 설계용역 완료

○ ‘14.11 : 교통영향분석 및 개선대책 수립용역 완료

○ ‘14.12 : 공영주차장 건설공사(건축,토목) 발주

○ ‘15. 2 : 건설사업관리(감리), 기계, 통신공사 발주

○ ‘15.3 ~ ’16.12 : 공영주차장 건설공사 착공 및 준공

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 서울약령시 공영주차장 건설 예산 배정

- 관련공문 : 서울약령시 공영주차장 건설공사 사업예산 배정요청

: 동대문구 주차행정과-2059호 (2015.1.23)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위 : 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	착공예정	비고
계		31,522	17,880	13,642
공사 내역	건설비	7,117	3,000	4,117	‘15.3
	감리비	1,528	-	1,528
	토지매입비 (보상비)	22,877	14,880	7,997

□ 예산배정 검토

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘14년이전	‘15년			‘16년이후	비고
			계	기배정	금회배정
계	31,522	26,800	4,722	-	4,722	-
시 비	17,880	14,880	3,000	-	3,000	-
구 비	13,642	11,920	1,722		1,722	-

□ 요청 사유

○ 건설사업관리(감리), 기계·통신공사 발주시기 도래에 따른 배정 요청

□ 검토 의견

○ 동 사업은 실시설계 용역완료(‘14.11준공) 및 전기·소방공사, 건축·토목공사 발주(’14.12월)가 기 이행된 상태로 사업은 정상정적으로 추진되고 있는 것으로 판단되며

※ 동 공사는 조달발주사업 추진예정으로 계약심사대상이 아님

○ 감리용역 및 기계,통신공사 등을 추진키 위해 ‘15년 편성된 시비 3,000백만원 요청하는 사항으로 공사가 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

첨부   관련서류(별도) 1부.   끝.