투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	준공정산 계약변경 의뢰『장충체육관 리모델링 기계설비공사(2차,총차)』

우리 본부에서 시행 중인 “장충체육관 리모델링 기계설비공사”에 대하여 아래와 같이 준공정산 설계변경에 따른 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 장충체육관 리모델링 기계설비공사

나. 계약금액 : 3,370,046,000원

다. 공사기간 : 총차 `12.7.5 ~ `15.1.31(2차 `13.12.2 ~ `15.1.31)

라. 계 약 자 : ㈜수정이엔씨

마. 계약변경 내용                               (단위 : 원)

구분	계약 금액		증감액	변경 사유
	당 초	변 경
총차	3,370,046,000	3,366,658,000	▵3,388,000
2차	1,870,046,000	1,866,658,000	▵3,388,000	정산 설계변경 및 보험료정산

※ 공사기간 변동 없음

바. 예산과목 : 문화관광디자인본부 체육진흥과, 시민체육 및 국제스포츠진흥발전, 시민체육공간확충, 장충체육리모델링, 시설비

붙임 1) 준공정산 설계변경 검토서 1부.

2) 준공정산 설계내역서(2차) 1부.

3) 감리검토 보고서. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	이종근		열빛총괄과장	이달영		설비부장	전결 02/02 박기형
협조자	경리과장	허금도
시행	설비부-1353	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15, 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	keun@seoul.go.kr	/	대시민공개