문서번호	도로보수과-1260
결재일자	2015.2.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정병구		이규철	02/10 임대성
협조
	주무관		이상하

2015년 도로굴착복구공사(연간단가) 발주계획

2015. 2.

서부도로사업소

(도로보수과)

2015년 도로굴착복구공사(연간단가) 발주 계획

우리 사업소에서 유지관리 중인 특별시도(중구, 용산구, 마포구, 서대문구, 은평구)에 대한 2015년 도로굴착 관리청 복구를 위해 시행예정인  □2015년 도로굴착복구공사(연간단가)□ 발주계획 검토 보고 임.

Ⅰ		현황 및 개요

예산 배정 현황

구 분	예 산 과 목	예산 재배정
도로굴착기금	도시안전본부 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비	2,000,000천원

공사기간 : 착공일로 부터 ~ 2015. 12. 31

공사방법

◦ □서울특별시 도로굴착·복구업무 처리규칙□에 의한 도로관리청 복구시 공사시행

※ 굴착기관의 공사계획 및 복구의뢰 물량에 따라 공사량의 증·감 발생

과년도 굴착복구공사 실적(총공사비 기준)

구 분	공 사 개 요			공사실적
	소규모 포장복구	평삭 및 덧씌우기	소파 포장복구
2012년	114a	274a	-	1,681백만원
2013년	100a	216a	46.4a	1,680백만원
2014년	273a	675a	10.2a	4,064백만원

Ⅱ		문제점 및 조치계획

문제점

◦ 도로함몰 등 긴급복구 상황 발생대비 정비예산(사후포장정비 등)의 미배정

- 업무공백(2~4월)시 도로함몰 등 긴급조치 및 민원처리 곤란

- 2014년의 경우 도로굴착복구공사 발주시 포함 시행가능토록 조기 예산 배정

되었으나 금년도 예산 재배정은 3~4월로 예상됨.

조치계획

◦ 우선 도로굴착복구공사를 발주하여 업무공백이 발생하지 않도록 도로함몰이 발생할 경우 정비 복구토록 하고 및 향후 설계변경 정산처리

◦ 추후 포장정비비 예산 배정시 도로함몰 등 긴급대비 소규모 포장공사 포함하여 발주 및 시행

Ⅲ		2015년 공사 발주계획

발주원칙

◦ 도로굴착복구의 품질관리 향상 및 원활한 유지관리와 하자관리 측면을 고려하여 관리청 복구 및 차로 단위 복구 원칙 확행

◦ 굴착복구공사 구간 폐기물처리 및 노면표시 분리발주

※ 제설작업은 민간위탁용역으로 별도 발주(장기계속계약 발주 후 차수계약 시행)

공사 발주개요

◦ 공 사 명 : 2015년 도로굴착복구공사(연간단가)

◦ 공사기간 : 2015. 3월 ~ 12월 31일

◦ 총사업비 : 2,000백만원

◦ 발주계획 및 정비물량

구 분	소 요 예 산	정 비 물 량	비 고
도로굴착복구공사	1,800백만원	소규모 포장 92a, 차로복구 276a 소파 포장복구 13a
폐기물처리용역	100백만원	폐아스콘 3,243톤	분리발주
노면표시공사	100백만원	차선도색 복구 1식	분리발주
계	2,000백만원

입찰방법 : 일반공개경쟁

계약심사

◦ 계약심사 생략

(한시적 계약심사 제외대상 지정, 계약심사과-10105호, 2014.06.25)

향후계획

◦ 2015. 02. 12 : 공사발주 및 계약의뢰(서울시 재무과)

◦ 2015. 03월 초 : 공사계약 및 착공 예정

◦ 2015. 12월 말 : 공사 준공 예정

붙임 : 1) 2015년 도로굴착복구기금 예산 재배정 공문 1부.

2) 한시적 계약심사 제외대상 지정알림 공문 1부.

3) 2015년 도로굴착복구공사(연간단가) 설계 내역서 1부.   끝.