투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 불량맨홀정비공사(연간단가) 설계변경(3회) 정산 시행

1. 우리 사업소에서 시행 중인 『2014년 불량맨홀정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회) 정산 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 불량맨홀정비공사(연간단가)-서부

나. 공사기간 : 2014.03.28 ∼ 2015.02.28

다. 도 급 자 : 대실테크(주) 대표자 유조웅

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비		600,000,000	596,101,000	감 3,899,000
도급비	계	600,000,000	596,101,000	감 3,899,000
	공급가액	545,454,545	541,910,000	감 3,544,545
	부가가치세	54,545,455	54,191,000	감 354,455
이 전 비		-	-	-

마. 설계변경 사유 : 공사완료에 따른 최종 시공 물량 증·감 정산

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로

정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임   1) 설계변경 보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	김중철		도로보수과장	이규철		서부도로사업소장	02/12 임대성
협조자	주무관	이상하		주무관	홍용현		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1405	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8352	/전송	02-300-8364	/	kimjc4223@seoul.go.kr	/	대시민공개