문서번호	역사문화재과-16293
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	문화재정책팀장	역사문화재과장
김근형	조완석	07/31 황요한

운현궁 흰개미 방충공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황		사업비
	부서(단체)명	협의내용
문화재청- 2790(2014.6.23)호	문화재청 안전기준과	서울 운현궁 흰개미 피해 조사 실시 (조사일시 : 2014. 5. 12 / 조사자 : 국립문화재연구소 보존과학실 정소영)	27백만원 (전액 국비)

2014. 8

문화관광디자인본부

(역사문화재과)

운현궁 흰개미 방충공사 발주계획

□ 추진 경위

❍ 운현궁 수직사 내 흰개미 유시충 군비 확인 : 2014. 4

❍ 문화재청 국립문화재연구소 흰개미 피해 조사 : 2014. 5. 12

❍ 문화재청 흰개미 방충 긴급보수비 교부결정 : 2014. 6. 23

□ 사업 개요

❍ 대  상 : 사적 제257호 운현궁(종로구 삼일대로 464)

❍ 내  용 : 운현궁 수직사, 노락당 북행각 등 흰개미 방충 토양처리

❍ 사업비 : 27백만원(전액 국비)

❍ 기  간 : 2014. 10월

□ 세부 추진 계획

❍ 사업명 : 운현궁 흰개미 방충 토양처리

❍ 기  간 : 계약일로부터 1개월간

※ 도시기반시설본부 운현궁 수직사 해체 보수(’14. 10월)에 맞추어 추진

❍ 추진과정

1단계 : 드릴을 이용한 천공 작업

2단계 : 토양처리 희석액 혼합작업

3단계 : 천공한 지하에 살충제 주입

4단계 : 건물주변 방충 및 천공 되메움

❍ 추진내용

- 운현궁 수직사를 전면 해체 보수시, 건물 내(외)부 토양처리

- 노락당 북행각 및 유물전시관 주변 토양처리

❍ 사업비 : 금27,000,000원(금이천칠백만원)

❍ 계약방법 : 2인 이상 견적에 의한 전자공개 수의계약(지역제한)

- 근 거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호(수의계약)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정부 예규 제74호, 2014.2.5)에 의거 2인이상 견적서 제출(추정가격 8천만원 이하) 및 지정정보처리장치에 의한 계약 체결

- 참가업체를 서울, 경기, 인천으로 제한하여 공사 관리의 용이 도모

※ 업체 현황 : 서울(3개), 경기(7개), 인천(2개)

❍ 입찰참가 자격

- 문화재수리등에관한법률 제16조 및 동법시행령 제13조의 규정에 의거 전문문화재 수리업(보존과학업)으로 등록한 업체로서, 입찰 공고일 전일부터 입찰일까지 서울특별시, 경기도, 인천광역시 내에 주된 영업소를 두고 있는 자

❍ 예산과목 : 역사문화유산의계승발전, 문화재보존복원, 문화재 긴급보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

□ 추진 일정

❍ 운현궁 수직사 등 보수 설계 용역 완료 : 2014. 8월중

❍ 운현궁 보수 공사 발주 : 2014. 10월초

❍ 토양처리 공사 실시 : 2014. 10월중