문서번호	시설관리과-2822
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
차경호	김충완	이계환		03/04 문윤기
협 조
	주무관		배용우

2015년 자동제어설비 유지관리 용역 시행계획

2015. 03

북부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	시설물 유지관리 지침	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2015년 자동제어설비 유지관리 용역 시행계획

북부수도사업소 관내 배수지 ․ 가압장 ․ 증압장 자동제어 설비에 대한 유지관리 용역을 시행하여 정기적인 예방점검 및 고장 발생 시 신속한 복구체계를 확보하고자 함

추진근거

❍ 본부장 방침 제95호(2008.2.25)

자동제어설비 안정적 운영방향 모색을 위한 유지관리 업무개선으로

연간단가계약 추진

❍ 가압장배수지 운영관리 개선방안「본부장 방침:시설관리과-3164(‘12.7.27)」

자동제어용역 확대시행, 소규모 고장수리 시 개별 계약체결에

따른 보수지연 개선, 전문인력을 통한 사전 예방점검 및 유지관리

업무 효율성 향상

용역개요

❍ 용 역 명 : 2015년 자동제어설비 유지관리 용역

❍ 용역기간 : 2015. 4 ~ 2016. 3. 31

❍ 소요예산 : 68,000천원

❍ 용역대상 : 36개소 129회(14개소 35회 제외 ⇨ 하자26, 개량 9회)

구분	계	제어센터	가압장	배수지	증압장	비고
대상시설	41개소	1	8	8	24	1회/분기
용역물량	164 회	4	32	32	96

※ 용역대상 일부 제외 : 14개소 35회

․ 하자담보기간(2년) 이내 : 11개소 26회 → 가압장(3) 번동, 수유 상계 배수지(5)번동,                            수유5, 수유6, 4.19, 상계2 증압장(3) 방학, 무수골, 월계1

․ ‘15년 시설개량 대상 : 3개소 9회 → 배수지(1) 우이, 증압장(2) 도봉, 창동

❍ 점검주기 : 1회/분기별

2015년 용역추진 개선사항

❍ 문 제 점

축적된 기술력을 보유한 전문업체의 정기점검으로 안정적 설비         운영과 긴급복구 체계 확보는 되었으나,

사고 및 고장 빈도가 잦은 주요부품 및 수선비용이 연간단가           내역이 없어 긴급 복구하여야 함에도 각각 별도의 계약체결로          부품구입 및 수리까지 장기간 소요되어 업무개선이 필요함

❍ 개선내용

자동제어 설비중 고장 빈도가 잦은 주요부품 및 수선단가를            조사하여 용역내역에 추가 ⇨ 고장 발생 시 신속한 복구 가능

부품 고장에 따른 소규모 수선은 연간단가 계약업체에서 시행          하여 반복적인 소규모 수의계약을 지양토록 업무개선

【부품내역 및 수선단가 항목】

① PLC 모듈 5종(POWEA, 아날로그, 통신, DI, DO) ② UPS          수리 및 교체 ③ 신호․통신용 피뢰기 ④ OPS Computer 수리           ⑤ 인터치 판넬 수리 등

추진계획

❍ 발주방법 : 전자공개 수의계약(제한경쟁)

참가자격 : 소프트웨어진흥법에의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련         서비스업)로서 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에         의한 “전산업무(소프트웨어)개발” 직업생산증명확인서를 소지하고         서울시 및 경기도에 주된 사업장을 소재한 업체

❍ 소요예산 : 68,000천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

시설장비유지비(자동제어관리용역)

행정사항

❍ 2015. 3.05 : 설계 및 계약심사 요청(본부 재무회계과)

❍ 2015. 3.25 : 용역 발주 및 계약

❍ 2015. 4. 1 : 용역착공

붙 임 1. 2015년 기전설비 유지관리 추진계획 1부.

2. 설계내역서 1식.

3. 과업내용서 1식.  끝.