투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공기연장에 따른 계약금액 조정 신청서(간접비) 검토 결과 제출)

1.업무지시현장 :  남부순환로(개봉역주변) 구조개선 (주)동명기술공단종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2015-03-03 00:03:00

3.지 시 내 용

가. 케이에스씨 2015-32(2015. 2.26.)호와 관련임.

나. 우리 본부에서 시행중에 있는 “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사”에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 법률」제22조 및 같은법 시행령 제75조, 공사계약일반조건 제7절-4항에 의거 7차 및 8차 준공대가 수령전에 공기연장에 따른 계약금액 조정 신청서(간접비)가 제출되어 관련서류를 통보하오니 검토 후 결과를 2015. 3.18.(수)까지 제출하여 주시기 바라며,

다. 아울러, 우리 시에서는 ‘공사지연에 대한 행정조치 적극 이행으로 간접비 발생 최소화’를 위해 T/F팀을 구성 운영하고 있으며, 향후 간접비 청구시 심사위원회를 구성 운영 계획으로 있습니다.

라. 그러므로, 공기 지연사유 발생시 즉시 현장유지·관리계획을 제출토록 의무화하고, 제출받은 계획서의 면밀한 검토로 감리원의 확인과 자료에 의거 입증된 사항에 대해서만 간접비로 인정하여 최소화 금액으로 지급 할 계획임을 알려드리오니 공사 추진 업무에 참고하시기 바랍니다.

마. 특히, 본공사 차수계약시 간접노무비의 인력투입계획이 포함된 간접비 사용계획서를 제출받아 감리원 확인과 검토를 통하여 우리본부에 제출토록 하시기 바랍니다. 끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송  처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					진재섭					토목부장					03/04 노우성
협조자
시행			토목부-4355									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개