투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	『율곡로(창경궁앞) 수목이식공사』 준공기한 연기 의뢰

1. 우리 본부에서 시행중인 『율곡로(창경궁앞) 수목이식공사』에 대하여  아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 율곡로(창경궁앞) 수목이식공사

나. 계약업체 : (주)협동조경 대표 하강일

다. 계약금액 : 금 115,000,000원

라. 계 약 일 : 2009.12.17

마. 준공기한 : 2015.04.30

바. 준공기한 변경(연기) 의뢰 내역

구 분	공사기간		도급금액
	당 초	변 경	당 초	변 경
공 사	2009.12.21~2015.04.30	2009.12.21~2015.12.31 (증) 245일	115,000천원	변경없음

붙임 1) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기 검토 보고서 1부. 끝.

	방재시설부장
★주무관	김재무		조경시설과장	신용우		방재시설부장	03/05 임춘근
협조자
시행	방재시설부-2981	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 14층	/
전화	02)3708-8794	/전송	02)3708-8756	/	kjm640@seoul.go.kr	/	대시민공개