문서번호	급수운영과-4602
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	급수운영과장		남부수도사업소장
박장진	강동길	장시명		03/19 代이두영
협 조

2015년 시설물 설치 및 보수공사 발주계획

2015. 3

남부수도사업소

(급수운영과)

’15년 시설물 설치 및 보수공사 발주계획

상수도 시설물 연차별 정비계획에 따라 「2015년도 상수도 시설물 설치 및 보수 공사」를 발주하여 노후(고장)밸브 및 가압장 ․ 배수지 시설물 등을 정비 최적의 상수도시설물 상태를 유지코자합니다

관련 근거

2015년 시설물 유지관리사업 종합 추진계획 〔본부 시설관리과-416호, ’13. 1. 20〕

발주 계획

공 사 현 황

공 사 명	공 사 개 요	공 사 기 간
2015년 관악,금천구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)	- 노후 고장 밸브교체 : 150개소 - 철개굴상 및 교체 : 210개소 - 기타 시설물 보수 : 20개소	착공일로부터 ~ 2016. 4. 30

계약심사 요청금액 : 1,111백만원  〔도급비 771백만원, 관급비 및 기타 340백만원〕

입찰 및 계약방법

- 입 찰 : 일반공개 경쟁입찰

- 계 약 : 장기계속 단가계약

발주물량 산출

- 발주 예정물량은 3개년(’12 ~ ’13년) 시행물량 평균값으로 산정하고 2014년

시설물 정비 보수 예상량 추가산정

예 산 액 : 1,111백만원

- 노후 고장밸브 및 맨홀 정비 : 741백만원

- 가압장 배수지 유지보수 : 370백만원

추 진 일 정

공사계약 심사요청  : 2015. 03. 19 (사업소 → 시청 계약심사과)

설계심사 결과통보  : 2015. 03. 25 (시청 계약심사과 → 사업소)

공사 발주 및 계약의뢰  : 2015. 03. 27 (사업소 → 시청 재무과)

입찰공고 및 계약  : 2015. 03. 27 ~ 04. 13 (본청 계약기간 : 16일)

공 사 착 공  : 2015. 4. 20.

따로붙임 : 물량산출서 1부. 끝.