문서번호	조경과-6366
결재일자	2013.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이옥하	이성주	양현모		11/26 안영노
협 조
	총무과장		이경로

- 소동물관 생태행동 전시장 조성공사 -

준공기한 연기 검토보고

2013.11

서울대공원

( 조 경 과 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

- 소동물관 생태행동 전시장 조성공사 -

준공기한 연기 검토보고

『소동물관 생태행동 전시장 조성공사』와 관련하여 준공기한 연기 사유가 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 소동물관 생태행동 전시장 조성공사

○ 계약기간 : 2012.12.20 ~ 2013.11.30

○ 계약금액 : 금321,205,170원

○ 공사내용 : 너구리, 오소리 전시장, 관람시설, 내실 등 조성

○ 계약업체 : 주계약자 - ㈜전도종합건설 대표 전부중

부계약자 - 인영건설(주) 대표 최영화

Ⅱ		현 안 사 항

○ 본 공사 구간은 맹수사 일원으로 백두산 호랑이숲 조성공사와 연계하여 포장공사 등을 시행해야 하며, 작업로 공동사용 등 공사 중 간섭으로 인한 파손 등이 우려되어 소동물관 단독 개장이 불가하므로 호랑이사 공사 완료시까지로 공기 연장 필요

(백두산 호랑이숲 조성공사 준공기한 : 2013.12.31.)

Ⅲ		조 치 계 획

○ 위 현안사항과 같이 사업기간 연장이 불가피 하므로 아래와 같이 공사기간을 연장하여 본 사업의 효과를 극대화하고 관련업무에 만전을 기하고자 함.

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경 후
공사기간	2012.12.20~2013.11.30	2012.12.20~2013.12.31

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.