함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2014 강서구 관내 시설물 설치공사)-최종

우리사업소에서 시행한 『2014년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속 단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 계약의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 강서구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 2 〜 2015. 3. 31

다. 도 급 자 : 나일건설, 대표 이 춘 화

라. 설계변경 사유 : 신규공종, 계약물량 증 ․ 감

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비

소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수

바. 설계변경 내역                                               (단위 : 원)

구 분	총 부기금액		1차분		2차분		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
도 급 비	622,096,520	484,280,000	376,600,000	376,600,000	245,496,520	107,680,000

따로붙임 : 1) 설계변경 시행 방침서 1부.

2) 설계변경계획(최종) 및 설계변경 심의위원회 개최결과 각1부

3) 설계변경 내역서 1부.

4) 설계변경 심의 결과서 및 합의서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	서장원		주무관	손종백		시설관리과장	전결 03/27 이자원
협조자
시행	시설관리과-5955	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3146-4011	/전송	(02)3146-4039	/		/	대시민공개