투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 뚝섬공원 도로확장 개선공사

1. 시설관리과-547(2015.02.26.)호 관련입니다.

2. 「뚝섬공원 도로확장 개선공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

공 사 명	뚝섬공원 도로확장 개선공사
계약상대자	하웅종합건설(주) (대표 : 조연하)
계 약 금 액	금732,500,000원(금칠억삼천이백오십만원정)
공 사 기 간	2014.04.17. ~ 2015.02.28.

나. 변경내역 : 계약금액 변경(감 18,710,000*)

변 경 내 역	변경전	변경후
계 약 금 액	732,500,000원	713,790,000원

다. 변경사유 **공사준공에 따른 제비율 정산 반영 등

붙     임 : 1. 계약의뢰서 1부

2. 설계변경내역서 1부

3. 계약조건, 예규 및 공통서식 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	04/09 이상국
협조자
시행	총무과-5660	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개