문서번호	설비부-4714
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		이달영	04/21 박기형
협조

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

전기공사 설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

전기공사 설계변경 시행 보고

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』의 실정보고사항을  반영한 물량변경에 대한 설계변경 사항 검토 보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사

○ 규    모 : 수전설비 700KVA, 터널등 967등, 가로등 84등, 기타 1식

○ 공사기간 : 2012.08.02 ~ 2015.12.31.(4차 ‘15.2.13 ~ ’15.12.31)

○ 공 사 비 : 총차-1,098,636,000원(4차-162,571,240원)

○ 시 공 사 : ㈜진영전력 /감 리 사 : ㈜동명기술공단 종합건축사사무소

관련근거

○ 동기강(전) 2015-193호(’15.04.17) 설계변경 검토 보고

보고내용

○ 설계변경 사유

- 운영부서 요구사항 반영 : 원격감시시스템을 시설공단본부 설비와 연계

- 인계전 수배전설비에 대한 안전관리자 선임 비용 반영.

- 지하차도 노출 횡단트레이를 매입배관으로 변경 반영.

○ 주요변경 사항

(단위:천원)

공 종	수량	변경사항		공사비		비고 (증감)
		당 초	변 경	당초	변경
원격감시제어공사	1식	구룡지하차도↔구룡터널	구룡지하차도↔구룡터널 구룡터널 ↔공단본부	78,479	87,679	9,200
전기안전대행료	1식	2개월	20개월	880	8,800	7,920
케이블트레이	1식	횡단구간 노출트레이	횡단구간 매입배관	128,700	129,327	627
합 계				208,059	225,806	17,747

○ 공사금액 변경 : 증17,747천원

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	1,098,636,000	1,116,383,000	17,747,000
1 차	78,000,000	78,000,000	준공
2 차	676,168,760	676,168,760	준공
3 차	181,896,000	181,896,000	준공
4 차	162,571,240	180,318,240	17,747,000

○ 공사기간 : 변경없음

○ 감리검토 : 운영부서 요구사항, 전기안전관리자 선임비용 및 노출트레이의 매입배관 변경은 적정한 것으로 판단됨

조치계획

○ 상기 설계변경 보고 사항을 검토한 결과 책임감리원의 검토의견이 타당한 것으로 판단되어 설계변경하고자 하며

○ 서울시 재무과 및 건설총괄부에 설계변경계약 의뢰하고자 함.

따로붙임  1 설계변경 요청서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.