투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청 (석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본및실시설계)

1. 서울시 교통운영과-8094(2015.4.24.)호와 관련 입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인 『석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계 용역

나. 용역개요

- 교통체계 개선 : 회전교차로 설치

∙지하차도(U타입부) 일부복개 : B=23M, L=22M

다. 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트

라. 준공기한 연기현황

구 분	용 역 비	당초준공기한	변경준공기한	비 고
전 체	131,590,000원	′15. 4.29	′15. 7.29	증)90

마. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 유관기관 협의 및 석촌지하차도 상부 복개구조물 설치(안) 검토에 따른 설계기간 부족

첨부 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 교통운영과-8094(2015. 4.24.)호 공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤원섭		토목설계과장	이승우		토목부장	04/28 노우성
협조자	주무관	김용범		계약2팀장	홍연화
시행	토목부-8738	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개