“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	동호대교 남단 진입램프 개량공사 폐기물처리용역 준공기한 연기 의뢰

1. 교량안전과-7417호(2015.4.29)와  관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행하고 있는 “동호대교 남단 진입램프 개량공사 폐기물처리용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 동호대교 남단 진입램프 개량공사 폐기물처리용역

나. 용 역 비 : 13,302,850원

다. 계 약 자 : 문화기업㈜ 대표 박해경

라. 공사기간 변경

- 당초 : 2014. 12. 10 ~ 2015. 4. 30

- 변경 : 2014. 12. 10 ~ 2015. 6. 30

마. 연기사유 : 동호대교 남단 진입램프 개량공사의 공사기간 연장에 따라 폐기물처리용역 연기

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 변경 보고서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	우창원		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	04/29 이용심
협조자
시행	교량안전과-7453	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개