투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	기성검사 결과 통보(구리암사대교 건설공사 15차3회 : 개산급)

1. 암사(감리) 2015-208호(2015.4.23.) 및 도화(감리) 2015–8511호(2015.4.29.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘구리암사대교 건설공사’ 책임감리원으로부터 기성검사(15차 3회 : 개산급)결과가 제출되어 다음과 같이 통보하오니 대금지급 등 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 구리암사대교건설공사(15차)

나. 계 약 자 : 현대건설(주) 대표 정수현

다. 계약기간 : 2014. 12.11. ∼ 2015.6.30.

라. 계약금액 : 18,517,000,000원

마. 책임감리 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

바. 기성금액

- 전회까지 기성금액  : 11,743,000,000원

- 금회(3회)기성금액 :   1,934,000,000원

- 기성금액 누계      : 13,677,000,000원(66.33%)

붙  임 : 기성검사조서(15차3회) 및 기성내역서 1 부.   끝.

	토목부장
주무관	한병찬		광역도로과장	진재섭		토목부장	04/30 노우성
협조자
시행	토목부-8906	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	bchan1005@seoul.go.kr	/	대시민공개