투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	한강공원 나들목증설공사(신청담) 전면책임감리용역 설계변경(전체2회, 2차1회) 계약 의뢰

우리본부에서 시행중인 「한강공원 나들목 증설공사(신청담) 전면책임감리용역(장기계속)」에 대하여 설계변경(전체2회, 2차1회)에 대하여 아래와 같이 계약의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 한강공원 나들목 증설공사(신청담) 전면책임감리용역(장기계속)

나. 용역개요 : 보행자전용 나들목 신설(육갑문 및 E/V 2개소) 책임감리

- 신청담 나들목 : 폭 5.0m,  높이 3.5m, 연장 83.5m

다. 용역기간 : 전체 ‘13.04.26 ~‘16.05.01

2차  ‘15.01.02 ~‘15.12.30

라. 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

마. 설계변경사유 : 지방계약법 제22조 물가변동 등에 따른 계약금액의 조정 등

바. 설계변경 내역

(단위:천원)

총 괄(2회)			1 차		2차(1회)			향후
당초	변경	증·감	당초	변경	당초	변경	증·감
875,700	905,800	증 30,100	150,000	150,000	260,000	315,600	증 55,600	440,200

아. 예산과목 :

한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성회복 및 시민편의 개선,

한강접근체계개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 감리비(100-401-02)

붙임 : 1. 설계변경 방침 1부.

2. 물가변동 등에 따른 계약금액 조정 보고서 1부

3. 설계변경 내역서(전체1회) 1부.

4. 설계변경 내역서(2차1회) 1부. 끝.

	치수과장
주무관	방호익		치수과장	06/16 김용제
협조자	주무관	박정태
시행	치수과-2131	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개