문서번호	설비부-7656
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		이달영	06/26 박기형
협조

「구리암사대교 연결도로 건설공사」

교통신호 추가공사 설계도서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『구리암사대교 연결도로 건설공사」

교통신호 추가공사 설계도서 검토보고

「구리암사대교 연결도로 건설공사」와 관련하여 토목부에서 설계변경을 위한 설계도서 검토 요청이 있어 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

❍ 토목부-11171(2016.06.01.) : 교통신호기 추가공사 설계도서 검토요청

Ⅱ		설계변경개요

❍ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

❍ 공사내용 : 교통신호기 추가설치 공사

❍ 설계금액 : 23,075천원

❍ 시 공 사 : ㈜신성건설

Ⅲ		검토내용

❍ 변경사유 : 경찰청 교통규제심의 결과에 따른 교통신호기 추가설치

❍ 검토결과

(단위: 천원)

공 종		설계변경 요청금액	검토결과조정금액	증․감
교통신호기 설치공사	․차량신호등 3본 이설 및 1본 신설	23,075	22,555	감519
	․보행신호등, 잔여표시기 신설(2조) 및 이설(1조)
	․차량등(LED1면4색 2조, 1면3색 1조)신설 및 이설
	․배관배선공사 1식

※ 세부내용은 검토의견서 참조

Ⅳ		감리검토의견

❍ 공사비 산정은 기 실시된 자문결과를 반영하였고

❍ 교통처리계획도에 의한 변경 규제심의결과 및 설계물량 정산, 관할사업소와 협의된 내용을 반영한 도서검토 결과 적정함

Ⅳ		조치의견

❍ 상기 설계도서 검토 결과 관련규정에(기 심의 결과 등)의거 적정하게 설계되었으나 물량․공량산출 오류 및 중복 적용된 노무비가 있어 감 조정하여 설계도서를 토목부에 통보

붙임  1. 설계도서 검토의견 및 검토내역 각1부. 끝.