문서번호	도시철도설비부-11016
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	설비계획과장	도시철도설비부장		도시철도국장
오임석	강재천	정찬웅		12/01 김준기
협 조
	주무관		이재구
	주무관		장병선
	주무관		최경수

9호선 2단계 승강설비 특별점검계획

2014. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울메트로	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

9호선 2단계구간 승강설비 특별 점검계획

9호선 2단계구간에 설치될 승강설비에 대하여 특별점검을 실시하여 적정설치 및 안전한 운행관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 추진배경

○ 최근 민간 및 우리시 지하철역에서 승강기 안전사고가 발생되어 인명 및   재산피해가 발생되고 있어, 건설중인 지하철 정거장에 승강설비에  대하여 특별 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 필요성 대두

- 에스컬레이터 역주행 및 끼임사고, 엘리베이터 갇힘 및 추락사고 등  안전사고 예방을 위한 대책의 일환으로 특별점검 실시

Ⅱ. 공사현항

□ 공사개요

○ 위    치 : 논현동 ~ 삼성동 코엑스 ~ 종합운동장

○ 규    모 : 총연장 4.5㎞, 정거장 5개소(환승역 2개소)

○ 공사기간 : ‘08. 6 ~ ‘14.12.

○ 공사개요 : 총 127대(E/S 105대, E/V 22대)

□ 그간 추진사항

○ ‘13. 7월초 : 승강기 구매계약

○ ‘14. 9.24 : 기계설비 종합 시운전계획 수립 통보

○ ‘14.11월  : 설치중(추진공정 : 58%)

Ⅲ. 전문가 특별 점검계획

□ 안전확보를 위한 조치절차

공장제작검사	⇒		안전인증	⇒			특별점검	⇒		완성검사 및 종합시운전
(제작사)		(한국산업기술시험원)				(승강기 전문가)				(승강기안전관리원, 본부, 감리단, 시공사)

□ 특별점검개요

○ 점검시기 : 2회(설치중 : 12월~1월, 시운전시 : 1~2월)

※ 설치시기가 각기 달라 순차적으로 실시하되 필요시 점검시기 협의조정

○ 점검대상 : 총 127대

(단위 : 대)

구 분	계	915공구	916공구	917공구
계	127	48	54	25
엘리베이터 (E/V)	22	8	8	6
에스컬레이터 (E/S)	105	40	46	19

○ 주요 점검내용 : 세부내용 따로붙인 점검표 참조

- 설치조건 충족, 적정설치 여부 및 안전확보 상태 등

- 승강설비의 기능유지 및 정상작동 여부 등(단동시운전 병행실시)

□ 세부 점검계획

○ 점검반 편성 : 승강기 전문가 (협조 : 서울메트로)

- 정거장별 점검반 편성 및 점검일정 : 따로붙임

- 본부 공사관리관, 기계감리원, 시공사(입회)

※ 전문가 선정 : 서울메트로 의뢰하여 전문가 추천받아 공구별 배치

○ 점검내용 : 따로붙인 점검표에 의거 실시

〈서류점검〉- 자체시험 및 완성검사 여부 등

〈설비점검〉- 난간, 구조부, 구동부, 스텝, 안전장치 적정설치 여부

○ 시행방법 : 단계별로 구분 시행

- 1단계 : 설치중 점검

주요항목	점검내용	시행시기	비고
서류점검	∙ 인증품목 인증여부 ∙ 도면 및 시방서 적합여부 등	‘14. 12 ~‘15. 1
설치조건	∙ 구조물 설치완료 및 현장정리 여부 ∙ 설치조건 충족여부 등

- 2단계 : 시운전시 점검

주요항목	점검내용	시행시기	비고
서류점검	∙ 완성검사 필증 취득여부 ∙ 준공도서에 의한 적정성 등	‘15. 1 ~‘15. 2
가동조건 및 안전상태	∙ 진동, 소음발생 여부 ∙ 안전시설 설치 및 작동상태 등

※ 실부하시험, 완성검사(한국승강기안전관리원 등)는 개통전에 별도 시행

□ 점검결과 조치계획

○ 지적사항은 해당 감리단에 통보하여 보완토록 조치하고,

보완여부 확인점검

- 1차 : 이행내용 현장확인(본부, 감리단, 시공사, 운영기관)

- 2차 : 완성검사시 지적사항 이행여부 재확인

Ⅳ. 행정사항

○ 승강기 전문가 투입 ‧ 특별점검 및 결과 제출 : 서울메트로 시행

- 편성표 및 점검계획에 따라 점검 후 본부에 점검결과 제출

- 점검반, 공사관리관, 기계감리원, 시공사현장대리인은 점검당일 해당 정거장 대합실에 집결후 점검 및 입회

○ 안전관리원 현장배치 : 각 공구별 시공사 책임조치

○ 점검결과 지적사항은 완성검사 및 개통 전까지 조치

- 점검결과 해당공구에 조치토록 통보(본부) → 검토 및 보완조치후 이행여부 확인(본부, 감리단 및 시공사) → 완성검사(검사기관)

붙임 : 1. 점검반 편성 및 점검일정 1부.

2. 점검표(E/S, E/V) 각 1부.  끝.