문서번호	시설보수과-5126
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	07/06 조병준
협조

『2015년 하반기』도로시설물 정기점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

2015년 하반기 도로시설물 정기점검 시행계획

우리사업소 소관 도로시설물에 대한 2015년도 하반기 정기점검 시행계획을 수립 및 시행함으로써 해당 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ.  정기점검 개요

■ 관련근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조

(안전점검의 실시 : 정기점검 - 반기에 1회 이상 실시)

■ 대상 시설물현황

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	57	17	8	6	5	17	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	23	7	5	2	1	8
법정외	27	10	3	4	-	7	3

※ 선유교(보도교)는 일반교량에 포함됨

※ 서부트럭터미널앞지하차도는 도기본에서 인수인계완료 이후 정기점검 시행

■ 점검기간

◎ 상반기 정기점검 : 2015. 7. 1. ~ 12. 31.

Ⅱ. 세부 점검계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 유태용, 토목운영7급 조정갑
2 조	시설6급 윤동원, 토목운영7급 조정갑
3 조	시설7급 김규춘, 토목7급 김승진

※ 주 점검자(점검 책임자) : 시설물 담당자

■ 담당자별 시설물 현황

직 명	성 명	담 당 시 설 물	비고
시설6급 (토 목)	유태용 (12)	- 목동교(2종․B), 안양교(2종․C), 선유교(법외․A) - 개봉철도고가(2종․B), 화곡고가(법외․B) - 신월IC(법외․B), 오류IC(법외․B), 시흥IC(법외․B) - 작동터널(1종․B) - 국회앞지하차도(2종․B), 등촌지하차도(2종․B), 목동교서측지하차도(법외․B)
시설6급 (토 목)	윤동원 (12)	- 서울교(2종․B), 고척교(2종․B), 광명교(법외․B), 개봉교(법외․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B), 개화교(법외․A) - 개봉고가(2종․B) - 궁동터널(1종․B), 생태터널(1종․A) - 오목교서측지하차도(법외․B) - 개화천복개(법외․B)
시설7급 (토 목)	김규춘 (12)	- 오목교(2종․B), 오금교(2종․B), 여의2교(2종․C), 광복교(법외․B), (구로)도림교(법외․B) - 가리봉철도고가(2종․C) - 개화IC(법외․B), 공단IC(2종,B) - 구로역지하차도(법외․B), 신도림지하차도(2종․B) - 도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(법외․B)
시설7급 (토 목)	김승진 (12)	- 구로1교(법외․B) - 구로고가(2종․B), 가마산고가(법외․B), 오류철도고가(법외․B) - 영등포R. IC(2종․B) - 화곡터널(2종․ B) - 가마산지하차도(2종․B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B), 서부트럭터미널앞 지하차도(1종․A) - 외발산지하차도(1종․B), 고척2지하차도(법외․B)
토목운영주사보	조정갑 (9)	- 역곡천교(법외, A), 신정교접속교(법외, B) - 범박터널(1종, A) - 오목지하차도(2종․B), 오금지하차도(2종․B), 서울교접속지하차도(법외․B), 성산지하차도(법외․B), 구로지하차도(2종․B), - 염창IC하부복개(법외․B)

■ 총 점검일수 : 70일 (57개 시설물 점검일수)

◎ 1조(13개소) - 15일,  2조(24개소) - 30일,  3조(21개소) - 25일

※ 추석대비(9월), 동절기대비(12월) 점검기간은 맞춤형 점검․순찰 시행

■ 점검계획 수립

◎ 점검 차량 사용과 시설물에 대한 도보․육안점검을 위하여 편성조별  화·목 요일 점검 및 시설물별 반기 1회 이상 정기점검 확행

◎ 부득이한 사유로 점검일 점검이 어려울시 익일 등으로 일정 변경 시행

◎ 서부트럭터미널앞지하차도는 도기본에서 인수인계 완료후 정기점검 시행

※ 정밀안전진단, 정밀점검 실시기간과 중복시에는 정기점검을 생략할 수 있음

(국토해양부고시 제2009-785호, 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침 3.3.1 정기점검)

■ 점검방법 및 기록

◎ 현장점검

- 점검일은 2인 1조로 현장점검 후 귀청하여 점검결과 보고서 작성

- 현장점검 시 통일된 복장, 카메라 및 통신기기 휴대

◎ 기존 손상 부분 조사

- 시설물 담당자(점검책임자)는 점검구간에 대해 이전에 시행한  안점점검․진단의 지적사항과 보수․보강 등 조치내용을 파악하고,

- 손상의 진행 또는 보수 이후 새로운 손상 발생여부 확인 등 보고서에  위치, 상태 등을 기록하여 지속적인 추적관리 시행

◎ 신규 손상 부분 조사

- 새로 발견된 손상부분은 점검 보고서에 위치, 상태 등을 기록하고,  손상의 진행여부를 지속적으로 추적관리

◎ 사진관리

- 시설물의 상태(손상, 보수․보강 등)를 사진 촬영하여 보고서에 첨부

Ⅲ. 간부직 현장점검계획

■ 소 장 : 월 1회 합동점검

연번	점검일	시설물명	점검구간	점검방법	비 고
1	7.09	안양교	상부	육안점검	유태용
2	8.20	가리봉철도고가	상부	“	김규춘
3	10.8	화곡터널	하행선	“	김승진
4	11.12	개봉고가	하부	“	윤동원

■ 시설보수과장 : 월 2회 합동점검

연번	점검일	시설물명	점검구간	점검방법	비 고
1	7.21	도림천복개(좌안)	상부	육안점검	김규춘
2	10.08	개봉고가	전구간	“	윤동원
3	11.05	범박터널	하행선	“	조정갑
4	8.11	서울교	상부	“	윤동원
5	7.28	신도림지하차도	전구간	“	김규춘
6	10.20	시흥IC	전구간	“	유태용
7	11.03	선유교	전구간	“	유태용
8	11.19	외발산지하차도	전구간	“	김승진

Ⅳ. 행정사항

■ 점검 결과 보고

◎ 점검결과 당일 또는 익일까지 소장 보고 원칙

◎ 교통통제를 요하거나 긴급 점검․진단 및 보수․보강을 요하는 경우에는 도시안전실장까지 즉시 보고 조치

■ 지적사항 조치

◎ 경미한 사항은 사업소 직영반 및 일상유지보수업체 활용 보수

◎ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항은 즉시 보고 후 전문가(시설안전자문단, 용역책임기술자 등) 의견 포함 조치계획(보수방법, 보수시기, 예산확보 등) 수립 시행

붙임 : 정기점검 일정표(일자별, 구간별).  끝.