문서번호	방재시설부-8943
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		김흥근	07/06 임춘근
협 조

교통안전시설 추가 설치 및 정리원 배치에 따른 비용 검토 보고

2015. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

교통안전시설 추가설치 및 정리원 배치에 따른 비용 검토 보고

서울대 정문 앞 교통안전을 위해 관할 경찰서에서 안전시설 추가설치 및 교통정리원 배치 요구가 있었으며 업무지시로 선 시행을 하였고 이에 소요되는 비용에 대한 실정보고 검토임

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로1 서울대학교 내․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 65,000㎥

- 서울대 내(공사완료) : 공대폭포 5,000㎥, 노천강당(버들골) 20,000㎥

- 서울대 정문 앞(토공 및 가시설 완료) : 40,000㎥

○ 공사기간 : ‘12. 1. 3 ~ ’17. 5.30

○ 총사업비 : 581억원

○ 시공사 / 사업관리 : 남광토건외 1 / 신명건설기술공사

관련근거

○ 업무협조 요청 : 경비교통과-7606(2014. 8. 1), -11304호(2014.11.17.)

○ 업무지시 : 방재시설부-8226호(2014. 8.27), -11927호92014.11.19)

보고내용

○ 서울대 정문 앞 교차로 구간에 등․하교시 교통이 혼잡하여 이를 해소하기 위한 방편으로 관할 경찰서에서 집중 혼잡시간(08~09시, 18~19시)에 교통정리원 배치를 요청함

○ 동절기 서울대 정문 앞 복공구간에 결빙으로 인한 차량 미끄럼 사고 예방을 위한 교통안전시설(속도제한표지, 절대감속안전표지판, 제설함 등) 추가 설치를 요청함

○ 업무지시로 위 사항을 선시행하였으며 이에 소요되는 비용에 대한 실정보고임

검토사항

○ 교통정리원은「전국모범운전자회 관악지회」와 협약을 맺고 1인 1시간 20,000원으로 계상되었고 공사준공기한(‘17.5월, 26,290천원)까지 반영하였으며 추후 사용시간에 따라 정산처리 함

○ 추가 교통안전시설은 LED간판 1개소, 원형표지판 10개소, 제설함 1개소, 고휘도 반사지 2종 각 10개소를 추가 설치하였으며 내역은 일부 서울시 표준단가와 재료비에 설치비(재료비 5%)를 적용하였으므로 산출내역(4,554천원) 작성은 적정하다 판단됨.

보고자 의견

○ 건설사업관리자의 검토내용이 적정하다 판단되므로 실정보고 사항을 승인조치하고 추후 설계변경시 반영하도록 하고자 함.

붙임 : 1. 현황사진 1부

2. 협약서 1부.  끝.