투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	건설사업관리기술자 배치계획 조정 및 계약내역(1차) 변경 요청(서울재사용플라자)

1. ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 PC-15-345(‘2015.07.07.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행하는 『서울재사용플라자 건설 전기 및 통신공사』의 실 착공시기에 적정하도록 아래와 같이 건설사업관리 기술자 배치계획 조정과 계약내역(1차) 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 배치계획 조정현황(변경사항)

- 총  차

구분	분 야	변경 전	변경 후	비고
상주 기술자	건축(고급)	‘15.04.22 ~‘17.03.21	‘15.04.13 ~‘17.03.12	기간조정
	전기(특급)	‘15.05.01 ~‘17.02.28	‘15.08.01 ~‘17.02.28	(감)3개월
	통신(중급)	‘16.04.02 ~‘17.02.28	‘15.10.01 ~‘17.01.15	(증)4.53개월 기간조정

- 1   차

구분	분 야	변경 전	변경 후	비고
상주 기술자	건축(고급)	‘15.04.22 ~‘15.10.17	‘15.04.13 ~‘15.10.17	(증) 9일
	전기(특급)	‘15.05.01 ~‘15.10.17	‘15.08.01 ~‘15.10.17	(감)3개월
	통신(중급)	-	‘15.10.01 ~‘15.10.17	(증) 17일

나. 계약금액 변경현황

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증감	비고
총 차	2,124,500,000	2,124,500,000	변경없음
1 차	600,000,000	571,160,000	(감)28,840,000	내역변경
향 후	1,524,500,000	1,553,340,000	(증)28,840,000

다. 계약기간 :‘15.01.22.~ ’17. 03.21(1차 ~ ‘15. 10.17) - 변경없음.

따로붙임 : 보고서 1부.  끝.』

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	이달영		설비부장	07/13 박기형
협조자
시행	설비부-8431	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개