투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『들소사 방사장정비 및 구조체 보수보강공사』설계변경 시행

1. 시설과–4179(2015.07.15)호와 관련입니다

2. 우리 대공원에서 시행중인“들소사 방사장정비및구조체 보수보강공사”와 관련하여 공사변경 및 준공기한 연기에 대하여 설계변경 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 들소사 방사장정비 및 구조체 보수보강공사

나. 공사금액 : 금229,500,000원

다. 공사기간 : 2015. 05. 13. ~ 2015. 07. 31

라. 계 약 자 : 경일건설㈜ 대표 김 기 영

마. 설계변경및준공기한 연기 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
도 급 비	203,546,000	229,500,000	증 25,954,000
공사기간	2015. 05. 13. ~ 2015. 07. 16	2015. 05. 13. ~ 2015. 07. 31	15일(연기)

바. 설계변경 사유 : 공사물량 증·감및제경비 정산, 준공기한 연기 등

붙임 : 1. 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고서 1부. 끝.

주무관	이상국		시설과장	공헌구		관리부장	07/15 심상원
협조자	총무과장	代백철
시행	시설과-4182	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7410	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개