문서번호	시설과-5322
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
심찬석	김도섭	07/24 강신재

.- 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 -

건축 건설사업관리기술자 철수 검토 보고

2015. 07

상수도사업본부

(시설안전부)

- 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 -

건축 건설사업관리기술자 철수 검토 보고

현재 건축공사는 각동 내 ․ 외부 마감공사 마무리 공정만이 남아 있으며, 향후 진행예정인 공사는 경비실 공사가 주된 공정으로 3계열 건축공사 착수전까지 건축 건설사업관리기술자를 철수하고자 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

보조사업관리자(건축) 철수계획 승인요청(뚝도CM 2015-286) : ’15.07.24.

Ⅱ		철 수 사 유

현재 진행중인 주요 건축공사가 없음

- 각 동 내․외부 마감공사 잔손보기 진행 중

- 향후 진행예정 공사는 경비실 공사만 있으므로 3계열 건축공사 착수 전까지 건축분야 건설사업관리기술자를 철수

Ⅲ		검 토 의 견

현재 건축분야 주된 예정공정은 경비실 공사이며, 이외 중요 건축공사는 없으므로 전체 사업공정을 감안하여 책임 건설사업관리기술자 의견대로 건축분야 건설사업기술자 철수(2015.8.1.)를 승인하고자 하며,

재투입시까지 업무대행자 지정에 의한 업무추진 및 기술지원 건설사업관리자를 적극 활용토록 하여 건축공사 진행에 차질이 없도록 하고자 합니다.

붙임 : 뚝도 CM단 보조사업관리자(건축) 철수계획 승인요청 공문 1부.  끝.