투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	생태공원과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2015년 여의도 한강숲(봄) 조성 공사

1. 생태공원과-1924(2015.08.04.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 여의도 한강숲(봄) 조성 공사
	계약상대자	(주)티엠에스조경건설 (대표 : 유병태)
	변경계약일자	2015.08.12
변 경 내 역	내 용	준공기한 연장, 계약금액 변경 없음
	변경사유	고온으로 인한 수목고사율 증가로 공기 연장
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.05.29	변경후 착공일자	2015.05.29
	변경전 준공기한	2015.08.26	변경후 준공기한	2015.09.30
금 액 변 경	변 경 전	725,290,670 원
	변경금액	-
	변 경 후	725,290,670 원

붙     임 : 변경계약체결통보서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	08/13 이상국
협조자
시행	총무과-13717	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개