문서번호	환경과-4057
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
한미라		이철범	08/17 송대식
협조
	총무과장		최대봉

한강공원 청소용역 원가계산 용역계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

한강사업본부

(환 경 과)

한강공원 청소용역 원가계산 용역계획

2016년 한강공원 둔치 및 화장실 청소용역 예정가격을 산정하기 위하여 원가계산용역을 실시하고자 함

1		한강공원 청소용역 추진현황

□ ‘03. 03             : 한강공원 청소용역 시장 방침

□ ‘03. 04 ～ ’15. 02 : 1~4차 청소용역 (차수별 3년)

□ ‘15. 03 ～ ’15. 12 : 5차 청소용역 (10개월)

※ ’13년부터 민간위탁제외 (행정1부시장 방침제10363호, 조직담당관-111797호, ’11.12.26)하여, ’15년부터 단년도 계약체결 시행

2		원가계산 용역현황

□ 청소용역 대상

- 한강공원 둔치 및 화장실

구분	계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	난지	망원	강서
둔치면적 (㎢)	8.99	1.55	0.54	0.83	0.48	0.57	0.92	1.49	0.36	0.79	0.42	1.04
화장실 (개소)	148	13	13	20	10	4	16	25	6	16	14	4

- 호안가: 잠실, 반포, 여의도(샛강 및 샛강 수상 포함), 강서

□ 수행기간 : 2016. 1월 ~ 12월

3		청소인력 및 장비현황

□ 인력

구 분	계	미화원	순찰자	운전원	화장실관리원
계	123	115	1	4	3
상 용	79	72	1	3	3
성수기	19	18		1
심야청소	25	25

※ 2016년도 추가 인력투입 : ① 화장실유지관리원 1인(화장실 노후화로 충원)

②운전기사(기간제) 1인(재활용품 자체 수집운송 및 폐기물운송거리 고려)

□ 장비

계	운반차	압축차	집게차	전기차	순찰차	오토바이	화장실 유 지	전 기 자전거	브로워
71	2	1	3	35	1	11	2	13	3

※ 2016년 변경사항 : ① 유지관리 지원차량 1대 추가 (화장실관리원 2인→3인으로 증가)

② 진공차는 활용도가 없어 제외

③ 전기자전거11대 감소하고 오토바이 11대로 대체

4		원가계산 용역계획

□ 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행규칙 제9조 제2항

□ 용역업체 : 21C 국민경제연구소(견적가 및 용역전문기관)

□ 용역기간 : 계약체결일로부터 20일 이내

□ 용역내용 : 청소용역비 예정가격 산정(과업지시서 참조)

- 한강공원 시설현황 및 청소방법, 기준 등을 근거로 산출

- 청소용역원가는 용역원가계산방식에 의한 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 구분하여 산출

- 재활용품 판매수익은 수거판매량, 단가 등을 명확히 파악하여 현실에 맞게 청소용역비에서 정산할 수 있도록 산출

- 경비는 한강공원 청소용역을 완성하기 위하여 소비되는 용역경비 산출

□ 용역방법 : 수의계약

- 사유 : 추정가격 5천만원 미만의 용역 수의계약 가능

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

□ 소요예산 : 4,600천원(원가계산용역기관 견적서 참고)

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설물 관리 및 개선, 둔치 및 화장실청소, 공공운영비(100-201-02)

5		향후계획

□ ’15.  9월 : 한강공원 청소용역 계획 수립

□ ’15.  9월 : 업체선정을 위한 계약심사

□ ’15. 10월 : 계약심의 및 원가계약심사

□ ’15. 11월. : 입찰공고 및 낙찰자 선정 등

□ ’16. 01월 : 신규업체 청소용역 시행

붙임  과업내용서(안) 1부.  끝.