문서번호	시설과-6357
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
황윤채		남상국	09/04 代김윤철
협 조

남산공원 시설재정사업 실시설계

용역 준공기한 연기 검토보고

2015. 9.

남산공원 시설재정비사업 실시설계

용역 준공기한 연기 검토보고

남산공원 시설재정비사업 실시설계용역과 관련하여 체육시설물 및 안내판 전수조사의 용역수행기간을 연장하고자 검토 보고드림.

□ 용 역 개 요

○ 용 역 명 : 남산공원 시설재정비사업 실시설계용역

○ 용역기간 : 2015. 8. 18 ~ 9. 6

○ 도 급 액 : 12,630,000원

○ 도 급 자 : 애림조경기술사사무소  대표 강대균

□ 준공기한 연기

○ 연기기간

- 당  초 : 2015. 8. 18 ~ 2015. 9. 6

- 변  경 : 2015. 8. 18 ~ 2015. 9. 18

○ 연기사유 : 남산공원 전체 체육시설물(규모, 보수, 이용율 조사 등) 및 안내판(종류·위치·상태파악, 언어표기 오류조사 등)전수조사에 따른 용역수행기간 부족

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

○ 상기와 같이 용역준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  준공기한연기의뢰서 1부.  끝.